문서번호	물관리정책과-10671
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재이용관리팀장	물관리정책과장		물순환기획관
이두환	이웅희	배광환		06/26 김학진
협 조

물순환효과분석 및 인프라구축기술 개발연구 용역 준공기한 연기

2015. 6.

도시안전본부

(물관리정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

물순환효과분석 및 인프라구축기술 개발연구 용역 준공기한 연기

「물순환효과분석 및 인프라구축기술개발 연구용역」의 보다 내실있는 용역성과를 얻고자 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 함

1		용역현황

□ 용 역 명 : 물순환 효과분석 및 인프라구축기술 개발연구

□ 용 역 사 : 한국건설기술연구원외 2

□ 용역기간 : ‘14. 5. 2~ ’15. 7.25

□ 용역금액 : 235,200천원

□ 주요 과업내용

❍ 물순환 관련 국내·외 자료조사 및 분석

❍ 물순환 시설 모니터링 및 효과검증

❍ 강우 유출 및 수질오염 저감효과, 토양오염 영향분석

❍ 환경적 비용을 고려한 물순환 시설 도입 전·후의 편익비용 분석

❍ 물순환시설의 적정 구축방안 및 효과분석

❍ 설계 및 시공 기준 및 계획수립․유지관리 지침서 작성 등

2		추진현황

□  ’14. 2.19	학술연구용역 시행방침

□  ’14. 5. 2	계약 및 착수보고

□  ’14.12.12	1차 자문회의 개최

□  ’15. 4. 2	2차 자문회의 개최

3		보고내용

□ 준공기한 연기

당 초	⇒	변 경
2014.5.2 ~ 2015.7.25		2014.5.2 ~ 2015.11.25. (4개월 연장)

□ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 연기사유

❍ 본 용역은 물순환 시설 설치 후 강우에 따른 효과를 검증하고 인프라시설을 구축하는 방법을 연구하는 용역으로

❍ 용역 착수 후 시설설치에 따른 효과분석에 필요한 강우횟수 및 강우량 부족으로 인하여 인공적인 살수 등을 통한 효과를 분석 중이나 실제 강우에 따른 검증 필요

❍ 실제 강우에 의한 효과를 분석하고자 금년 우기중 지속적인 모니터링 및 분석 기간이 필요함

4		향후계획

□ ’15. 7	: 준공기한 연기 방침 알림 및 재계약

□ ’15.7~’15.9 : 강우에 의한 모니터링 실시

□ ’15. 10	: 분석 및 자문

□ ’15. 11.	: 용역완료. 끝.