문서번호	시설관리과-18481
결재일자	2015.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유형근		한상근	06/26 나태산
협조

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

(2014년 성북구관내 시설공사 및 급수공사건설폐기물 처리용역-2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의자료

가. 용역명 : 2014년 성북구 관내 시설공사 및 급수공사건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)-2차

나. 제  목 : 설계변경 심의

다. 일  시 : 2015. 6. 26(금) 13:30

라. 참석자 : 시설관리과장, 6급 채재일, 6급 유명수, 6급 한상근

6급 박혁순, 6급 최현태

마. 용역개요 : 당초 - 폐기물운반 1,143㎥, 폐기물처리 2,593톤

변경 - 폐기물운반 1,198㎥, 폐기물처리 2,646톤

바. 용역기간 :  2014.11.03 ~ 2015.6.30

(총계약 부기기한 : 2014.11.03 ~ 2015.06.30)

사. 용역금액

(단위 : 원)

구 분	금액		증 ․ 감
	당초	변경
도급액	43,507,000	43,993,400	증)486,400

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

자. 위원회 심의결과 : 상기 내용과 같이 설계변경 승인.  끝.

설계변경 심의내용

1. 용역 현황

가. 용 역 명 : 2014년 성북구 관내 시설공사 및 급수공사건설폐기물처리용역-2차(장기계속단가계약)

나. 용역개요 : 당초 - 폐기물운반 1,143㎥, 폐기물처리 2,593톤

변경 - 폐기물운반 1,198㎥, 폐기물처리 2,646톤

다. 용역기간 : 2014.11.03 ~ 2015.6.30

(총계약 부기기한 : 2014.11.03 ~ 2015.6.30)

라. 도 급 인 : ㈜진흥중공업 대표 박찬양

2. 설계변경 사유보고

가. 물량 증가 사항 발생

- 물량증가 : 폐아스콘(주간)운반 21㎥ 등 6개 공종

3.금액 변경 현황

구 분	금액(원)		증 ․ 감
	당 초	변 경
총 부기금액	43,507,000	43,993,400	증) 486,400
금차 계약금액	43,507,000	43,993,400	증) 486,400

- 본 공사는 장기계속단가계약 공사로 계약시 추정 시공물량으로 금년도 부기금액을 책정하였으나, 실제 시공물량을 정산한바 아래와 같이 금액 변동이 발생함.

4.설계변경 검토결과

- 2014년 성북구관내  시설공사 및 급수공사 폐기물 물량 증가로 인한 계약금액 조정