문서번호	수도자재관리센터-11988
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
조중엽		송영무	06/26 성시영
협 조

2014년 대형수도계량기 교체공사

준공정산 보고

2015. 6

2014년 대형수도계량기 교체공사

준공정산 보고

「2014년 대형수도계량기 교체공사」업무 수행중 당초 계약물량과 실제 교체물량의 변동으로 증․감사항이 발생함에 따라 설계변경을 시행하여 정산 및 준공처리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

공 사 명 : 대형수도계량기 교체공사(장기계속 단가계약)

계약상대자 : 솔바로건설(주) 한훈하

계약기간 : 2014.7.1. ~ 2015.6.30.

설계변경 개요

(단위 : 개소)

구 분	당초수량	변경수량	증감
기계식 계량기 교체 (기본교체)	835	946	증 111
기계식 계량기 교체 (전체교체)	541	689	증 148
휴일/야간 계량기 교체 (기본교체)	28	100	증 72
휴일/야간 계량기 교체 (전체교체)	17	55	증 38
고품질 계량기 교체 (기본교체)	297	40	감 257
고품질 계량기 교체 (전체교체)	187	101	감 86
기계식 계량기 신설	46	176	증 130
고품질 계량기 신설	368	19	감 349
폐전 계량기 철거	60	19	감 41
유량제어장치 설치	10	-	감 10
스트레이너 여과망 청소	200	-	감 200
미교체출장	177	415	증 238
대형전자식 계량기설치 부대공	368	36	감 332

계약금액 변경 내역

구분	당초	변경	증감	비고
도급비	638,888,000원	442,288,680원	감196,599,320원

Ⅱ		변경사유

당초 년간 교체 추정물량을 기준으로 설계발주하여 수도계량기 교체공사를 시행하였으나, 실제 교체공사 결과 재건축 물량 및 고품질계량기 설치 등 여건 변동으로 인한 공종별 물량 증․감 발생

Ⅲ		정 산

기성지급현황

- 개별단가로 산정하여 현재까지 총11회 417,514,590원 지급

세부정산

- 최종 준공금액 442,288,680원에서 기성지급 금액 417,514,590원을 제외한 나머지 24,774,090원 지급

Ⅳ		처리의견

상기 설계변경은 단가계약공사의 수량(물량) 증감에 관한 사항으로 변경계약 후 정산 및 준공처리함이 타당하다고 사료됨

붙임 : 변경 설계내역서 1부. 끝.