문서번호	시설관리과-18733
결재일자	2015.6.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이유찬		06/29 나태산
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2014년 중부관내긴급누수복구공사-최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.06.29

중부수도사업소

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리사업소에서 시행중인 “2014년 중부관내긴급누수복구공사

(장기계속단가계약)에 대하여 신규공종 및 시공물량  증,감에

따라 금액변경(감)이 있어 설계변경심의위원회(최종)를 개최하고

심의완료 결과를 보고함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 중부관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

공사개요	당 초	변 경	증 ․ 감
누수복구	2,530개소	1,741개소	(감)789개소
불용관, 노후관정비	520개소	1,044개소	(증)524개소

나. 공사개요 :

다. 공사기간 : 2014.07.07.~2015.06.30

라. 도 급 자 : *****************

2. 설계변경 현황 :

구 분	설계변경 현황			비 고
	당 초	변 경	증․감
도급비 (VAT포함)	4,186,803,048	4,170,672,000	(감)16,131,048

3. 설계변경 사유(물량증감 및 신규공종)

가. 공사중 물량 증․감사항 발생

- 물량증가 : 아스팔트포장절단(100~150mm,야간누수)외 99개 공종

- 물량감소 : 되메우기(인력)외 27개 공종

나. 신공종 발생

- 불용관터파기(1㎥, 야간)외 42개 공종

4. 심 의 개 최

가. 심의일시 :2015년 06월 29일(월) 오후 15:00

나. 심의위원

○ 위원장 : 시설관리과장

○ 참석자 : 시설관리과:******************

급수운영과:********,******************

다. 심의내용

○ 물량이 증감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

○ 도급액 범위내에서 물량변동

○ 신공종에 대해 낙찰율을 적용

○ 금액감액에 대한 검토

붙 임 : 설계변경내역서 및 심의결과서 1부. 끝.