문서번호	토목부-13307
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	06/29 노우성

폐기물처리용역 준공기한연기 검토보고(총차 및 5차)

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사외 1개소)

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

폐기물처리용역 준공기한연기 검토보고(총차 및 5차)

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사외 1개소)

본 공사 준공기한 연장(2015.10.31.)에 따라 폐기물처리용역 준공기한을 연기하고자 검토 보고

□ 관련 근거

○ 준공기한 연기 의뢰(토목부-13205호, 2015. 6.26.)

□ 용역개요

○ 용역명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사외 1개소 폐기물처리용역

○ 위   치 : 구로구 남부순환로 개봉역앞외 1개소

○ 사업규모

- 폐콘크리트 24,123.22톤, 폐아스콘 28,106.07톤

- 혼합폐기물 123.49톤 임목폐기물 50.0톤 건설폐토석266.11톤

○ 공사기간 : 총괄 -  2007.12.21 ~ 2015. 6.30

5차분 - 2015. 3. 1 ~ 2015. 6.30

○ 도 급 액 : 총괄 690,500,000원(5차분 – 77,576.,000원)

○ 시 공 사 : ㈜동보이엔씨

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단외 1사

□ 보고내용

○ 연장사유 : 선행중인 토목공사 공기연장에 따른 폐기물처리용역 준공기한 연기(준공기한 연기의뢰 토목부-13205호, 2015. 6.26.)

○ 용역기간 연장 요청일수

구 분	당 초	변 경	증 감
총차	2007.12.21 ~ 2015.6.30	2007.12.21 ~ 2015.10.31	증)123일
5차	2015.3.1 ~ 2015.6.30	2015.3.1 ~ 2015.10.31	증)123일

○ 계약금액 변경 내용

구 분		당 초	변 경	증·감
총차	개봉역	647,930,000	647,930,000	변경없음
	경인로	42,570,000	42,570,000	2011.02.28 준공완료
	계	690,500,000	690,500,000	변경없음
5차	개봉역	77,576,000	77,576,000	변경없음

□ 감리단 검토의견

○ 남부순환도로(개봉역앞) 구조개선공사외 1개소 폐기물처리용역은 선행 공종인 토목공사 현장에서 발생된 건설폐기물을 처리하는 용역으로서, 지방자치단체기술용역계약일반조건***************에 의거 용역기간 연장을 시행 하는 것이 타당하다고 판단됨.

□ 조치 계획

○ 감리단 검토의견과 같이 폐기물처리 용역(총차 및 5차) 준공기한을 연기하여 용역을 시행 하고자 함.

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음.

○ 지체상금부과 여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 용역(총차 및 5차) 준공기한 연기 감리 검토의견서  1부.  끝.