시 행	설비부-7735
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	배수웅	김영수	06/29 박기형

설계변경 자문회의(소위원회) 자문결과(제12차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-7472호				요청부서		열빛총괄과		자문일자		2015.06.29
공 사 명			구리암사대교 건설 전기공사
공 사 개 요			공사규모				- 가로등 설치 604본, 경관조명 설치 1식
			공사기간				2010.07.28 ∼ 2015.06.30
			감 리 사				㈜도화엔지니어링외 1개사
			설 계 사				㈜도화엔지니어링
			시 공 사				모범전설(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항
□ 설계변경 사유 (요약) - 강변북로 한전 특고압지장 전선로 이설 및 절연보호관 설치 - 올림픽대로 기존가로등 선로정비 등 시설관리공단 요청반영 - 경관조명공사 정산 및 수량조정 - 구리한강시민공원 진입로(신설) 가로등 추가공사 반영 - 구리방면 및 암사방면 가로등공사 정산
원설계자 의견
자문결과		조건부			붙임 자문위원 지적사항 보완 조건
자문결과 조치					· 자문위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김영수				간 사		배수웅
	위 원			김두환				위 원		박병환
	위 원			성호준				위 원		유영선