투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(2015년 한강도로변 수벽정비사업)

우리본부에서 발주하여 시행중인“2015년 한강도로변 수벽정비사업”에  대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 한강도로변 수벽정비공사

나. 공사기간 : 2015. 6. 27 ~ 6. 30

다. 계약금액 : ************

라. 계 약 자 :****************

마. 준공기한 연기

┏ 당   초 : 2015. 4. 27 ~ 6. 30

┗ 변   경 : 2015. 4. 27 ~ 7. 07

바. 연기 귀책소재 : 한강사업본부

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.

준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	박미란		녹지관리과장	06/29 代장창수
협조자
시행	녹지관리과-2847	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25(강변북로 257)	/
전화	02-3780-0846	/전송	02-3780-0745	/	orchid@seoul.go.kr	/	부분공개