문서번호	시설관리과-14368
결재일자	2015.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이동석		최희권	06/29 우종근
협조

설계변경 심의결과 및 변경시행 보고

[2014년 양평1동외 9개동 상수도공사(장기계속단가) - 3차(최종)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

남부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거「2014년 양평1동외 9개동 상수도공사(장기계속단가)」에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고합니다.

2015. 06.   .

보고자: 지방시설주사보 이동석

□ 심의대상

◦ 공 사 명 : 2014년 양평1동외 9개동 상수도공사(장기계속단가) - 3차(최종)

◦ 공사내용 : D=13 ~ 300㎜, L=1,062m

◦ 계약기간 : 2014. 7. 1. ~ 2015. 6. 30.

◦ 수 급 자 : 표석산업(주)  대표 이금례

◦ 도 급 비 : 401,742,000원

□ 심의일시 및 장소

◦ 2015. 06. 26(금)  2층 회의실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 신규공종 단가 및 계약물량 증․감 적용 적정여부

- 물량증감 : 아스팔트 포장절단(100~150㎜, 적용) 등 412개 공종

- 신규공종 : 아스팔트 포장절단(100~150㎜, 야간 적용) 등 21개 공종

◦ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

◦ 부대공 적정 산정 검토

◦ 계약금액 조정 (설계변경) 등.

□ 심의결과

◦ 계약변경 타당

◦ 주요 공종 변경사항 타당

◦ 세부공종 조정내역 타당

◦ 제경비 적용 타당

□ 설계변경

◦ 위 공사 시행중 현장여건 변화에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

- 물량증감 : 아스팔트 포장절단(100~150㎜, 적용) 등 412개 공종

- 신규공종 : 아스팔트 포장절단(100~150㎜, 야간 적용) 등 21개 공종

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 계약금액	401,874,580원	401,742,000원	132,580원	감액
1차수 계약금액	285,901,000원	285,901,000원	-	변동없음
2차수 계약금액	115,973,580원	115,841,000원	132,580원	감액

□ 조치의견

◦ 심사결과에 의거 설계변경 시행코자 하며 공사준공에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 사전심의 요청서 및 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증 확인서 1부.  끝.