문서번호	급수운영과-16271
결재일자	2015.6.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박종대		김광운	06/29 최명익
협조

설계변경 보고서

[2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)]-2차 최종

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

동부수도사업소

(급수운영과)

설계 변경(2차, 최종) 보고서

[2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)]

『2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)』시행 중 신규단가 및 시공물량 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(2차, 최종)을 시행하고자 합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사규모 : D=13~600㎜, L=2,010m

○ 공사기간 : 2014.07.01. ~ 2015.06.30.

○ 도 급 자 : ***************

○ 도 급 비 : ************

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 신규공종 및 시공물량 증･감 발생

- 신규공종 및 신규자재 발생

․ 신규공종 : 포장절단공(아스팔트 100~150mm)외 125개 공종

․ 신규자재 : 새들(슬립인조인트 40×20mm) 외 19개

- 시공물량 증･감 현황

․ 포장절단공(아스팔트 100~150mm)외 282개 공종 물량 증감

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 ･ 감
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	**********
도 급 비	***********	***********	**********

4				보고자 의견

○ 상기사항에 의거 설계변경 사항에 대하여 타당성 여부 등을 심의하여 설계변경에 반영하고자 우리사업소 설계변경 심사위원회 개최 후 그 결과에 의거 설계변경을 시행하고자 합니다.

첨 부 : 설계변경내역서 1부.  끝.