문서번호	정수시설과-2185
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이덕종		안길찬	06/29 박기석
협조

정수지 유입밸브외 부속설비 보수

계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

정수지 유입밸브외 부속설비 보수 계획 보고

2015년도 『정수지 유입밸브외 부속설비 보수』사업과 관련 장기간 사용에 따른 노후로 성능이 저하된 기기를 신속히 보수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황

○ 송수펌프동

품 명	규격	총댓수	제작년도	용도	비고
펌프흡입밸브	수동,BFV￠1200	9	1997년	흡입용	전동조작기로 교체
펌프토출밸브	수동,제수변￠900	9	1997년	토출용	전동조작기로 교체

※ 총18대중 8대는 금년도(2015년)에 교체하고, 나머지 10대는 내년도(2016년) 사업에 반영코자 함

○ 정수지

품 명	규격	총댓수	제작년도	용도	비고
유입밸브	BFV￠2000	4	1997년	유입용	전동조작기로 교체
유출밸브	BFV￠2000	4	1997년	유출용	전동조작기로 교체

※ 총8대중 유출쪽 4대는 2014년에 교체 완료, 나머지 유입쪽 4대는 금년도(2015년)에 교체코자 함

□ 사업개요

○ 대상 : 정수지외 1개소

○ 사업내용 : 노후로 성능이 저하된 밸브 부속설비 개선

○ 규모

- 송수펌프동 흡,토출밸브 교체 : BFV￠1200 4대, 제수변 ￠900 4대

- 정수지 유입밸브 교체        : BFV￠2000 4대

- 전기설비 등 기타 부대설비

○ 사업기간 : 2015. 6. 29 ~ 2015. 9. 30

□ 추진계획

○ 현장조사 및 설계 : 2015. 6. 28까지

○ 발주 및 계약     : 2015. 6. 29~ 2015. 7. 20

○ 교체작업 및 준공처리 : 2015. 7. 21 ~  2015. 9. 30까지

□ 예산 및 발주방법

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비

○ 예산현액 : 170,000천원

○ 사업내용

- 정수지 유입밸브 부속설비 4개소

- 송수펌프동 흡,토출밸브 부속설비 8개소

○ 발주방법

- 본부 설계심사후 발주(제한경쟁)

□ 기타 행정사항

○ 철거품 고재처리

기존 철거품인 밸브부속품등은 재활용이 불가하여 본 개량사업시 내역에 고재처리로 계상반영처리 코저 함  끝.