투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「서울대공원 독신자숙소 제2차 리모델링공사 폐기물처리 용역」준공기한 연기의뢰

1. 시설과-3805호(2015. 6. 29)호와 관련입니다.

2.『서울대공원 독신자숙소 제2차 리모델링공사 폐기물처리 용역』과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 용 역 명 : 서울대공원 독신자숙소 제2차 리모델링공사 폐기물처리 용역

나. 계 약 자 : ㈜한강건설환경

다. 계약금액 : 일금이백육십사만원정(\2,640,000원)

라. 변경내용

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
준공기한	‘15.05.01 ~‘15.06.29	‘15.05.01 ~‘15.07.13	14일간

마. 연기사유

-  건축공사 준공기한에 맞춰 폐기물처리 용역기한 연기

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 공원 이용시민 만족도 향상, 산림 내 이용시설 및 조경관리 강화, 꽃동산 조성 및 녹지 조경시설물 유지관리, 시설비

첨부 : 방침서 1부.  끝.

	시설과장
★주무관	이강호		시설과장	06/29 代조대복
협조자	주무관	이상국		주무관	오창호
시행	시설과-3807	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7411	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개