투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	기계설비분야 4차 공정회의결과 알림

1. 9호선 2단계 기계설비공사 추진과 관련하여 ‘14.11.27 실시한 기계설비분야 4차 공정회의결과, 선행공정이 계속 지연됨에 따라 기계설비공사 추진이 지연되고 있다는 보고가 있어 따로붙임[도시철도설비부-11038 호(’14.12.2)]과 같이 알려드리니

2. 타 분야(부서) 협조요청사항과 지연되고 있는 분야별 공정에 대하여는 공정만회대책을 시행하는 등 특단의 조치를 하여 주시고, 아울러 각감리단에서는 시설물검증시험(‘14.12.1~12.12) 및 영업시운전(‘14.12.20~ 15.2.25)에 차질없도록 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 공정회의결과보고서 사본 1부.

2. 9호선 2단계 출입구 구조물 등 공사추진현황 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	915~917공구 감리단장,도시철도토목부장,도시철도건축부장
주무관	오임석		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	12/03 정찬웅
협조자	주무관	최경수		주무관	장병선		주무관	이재구
시행	도시철도설비부-11085	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 삼일대로 231(중구 예장동산5-85) 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7310	/전송	772-7308	/	ois43122@seoul.go.kr	/	대시민공개