문서번호	도시철도설비부-305
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	01/12 정찬웅
협 조
	시설전기과장			서태창
	주무관			이재구
	주무관			장병선
	주무관			최경수

9호선 2단계 기계설비공사

개통대비 긴급 현안회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비공사

개통대비 긴급 현안회의 결과보고

9호선 2단계 영업시운전 및 개통대비 관련 현안사항 등에 대하여 협의코자 긴급 현안회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

‘’

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 1. 8(목). 16:30 ~ 17:30

○ 장  소 : 도시철도설비부 회의실(8층)

○ 참석자 : 12명

- 본부 6명(도철설비부장, 설비계획과장 외 4명)

- 감리원 및 시공사 6명(915~917 기계감리원 및 시공사 기계현장대리인)

○ 안  건

- 영업시운전 및 개통대비 현안사항 협의 및 지시사항 전달 등

□ 회의결과

○ 전편성 영업시운전(1.31)대비 사전조치사항 검토‧협의(참석자)

- 역무실 등 직원상주공간 공조설비 가동 및 화장실 마무리 추진

- PSD 성능시험, 선로출입문 도어락 설치 및 자동운전 가능토록 조치

- 본선환기휀은 역무실에서 자동제어로 조작이 가능토록 조치

○ 3.28(토) 개통대비 현안사항 검토 및 조치방안 협의

- 승강설비(E/S, E/V) 가동 및 안정화 후 부하시험, 완성검사 추진

- 공조기계실 장비 역무실에서 자동제어 가능토록 시운전 추진

- 본선 및 정거장 공조설비 등 TAB 시행 추진

- 소방검사대비 기계분야 소방설비 설치완료 및 자체 사전점검 실시

- 자동제어설비 단동시험, 종합사령실 종합시운전대비 점검 및 준비

○ 타분야 협조 및 애로사항 등 전달(감리단 및 시공사)

- 외부출입구, 환기구 등 구조물 및 건축마감 조속 마무리(토목,건축)

- 시운전에 지장없도록 공조기계실 등 적치자재 및 쓰레기 반출(전분야)

- 시운전대비 전원공급 협조, 화재수신반 설치 및 사전점검(전기)

○ 지시 및 협조사항 당부(본부)

- 선로청소 및 승강장 건축마감 지연 등으로 먼지가 많아 PSD 등   영업시운전에 지장이 있으므로 조속한 마감 및 청소실시

- 설치완료되어 가동 가능한 승강설비, 송풍기 등은 우선 시운전 추진

- 개통에 지장없도록 공정 추진에 최선을 다하고, 안전사고 예방철저

- 전편성 영업시운전 전에 가인계 가능토록 준공도면, 예비품 및 장비일람표 등 관련자료 사전준비

-  공정추진현황 및 장비 시운전 추진계획, 현안사항 등은 다음차 공정회의 전에 보고

□ 향후계획

○ 회의결과는 915~917공구 감리단 및 협조부서(도철토목부.건축부)에 통보

○ ‘15.1.12~ :  설치완료된 기계설비 사전점검 및 시운전 추진

○ ‘15.1.16   :  7차 공정회의 실시.

붙임 : 926~930정거장 공정관리 및 잔여공사현황 1부.  끝.