투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 2단계 기계설비공사 9차 공정회의결과 통보

1. 도시철도설비부-1599호(2015.2.13)와 관련입니다.

2. 9호선 2단계 개통을 대비하여 기계설비공사 미진사항 등에  대하여 협의 및 조치방안을 강구코자 9차 공정회의를 실시한 결과를 따로 붙임과 같이 통보하오니

3. 각 감리단(부서)에서는 추진이 미진한 토목 및 건축공정에  대해서는 특단의 조치를 취하여 주시기 바라며, 특히 본선 및 정거장 환기구, 외부출입구 등 구조물 공사지연 및 잔재적치 등으로 환기설비 시운전이 곤란하고 승강설비(E/V, E/S) 설치지연이 초래하고 있는 바, ‘15.3.38(토)  개통에 지장없도록 조속한 조치를 하여 주시기 바랍니다.

4. 서울메트로에서는 승강기 설치시기가 각기 다르고 개통이   임박한 점을 감안하시어 승강설비 특별점검(시운전) 시기를 해당 감리단과 협의하시어 ‘15.3.10 이전에 마무리 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기   바랍니다.

붙 임 : 기계설비분야 9차 공정회의결과 보고서 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,도시철도건축부장,915~917공구 책임감리원,서울메트로사장
주무관	오임석		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	02/16 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-1651	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 청계천로 8(중구 무교동 96) 프리미어 플레이스빌딩 8층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7293	/전송	772-7308	/	ois43122@seoul.go.kr	/	대시민공개