문서번호	교통운영과-9799
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
문기영		유승효	05/21 강진동
협조
	주무관		임홍필

설계변경(정산) 보고

(2014 횡단보도 기본 및 실시설계 용역)

2015. 5.

도시교통본부

(교통운영과)

설계변경(정산)보고

보행자의 이동 편의 증진과 보행권 확보를 위하여 시행중인  『2014년 횡단보도 설치 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 2014년 횡단보도 설치 기본 및 실시설계

□ 용역규모 : 기본설계 18개소, 실시설계 16개소, 모니터링 10개소

□ 사업기간 : 2014. 5. 23 ~ 2015. 5. 25

□ 계약금액 : 75,500천원

□ 계약업체 : ㈜동일기술공사  대표 김수보

□ 설계변경 내용

(단위 : 천원)

구분	계약금액(당초)	변경금액(변경)	증감액	비고
직접인건비	20,184	25,218	증5,034
직접경비	17,405	4,887	감12,518
제경비	22,203	27,739	증5,536
기술료	8,477	10,390	증1,913
순원가	68,269	68,235	감34
부가가치세	6,827	6,823	감4
손해배상보험료	404	442	증38
도급비	75,500	75,500	-

□ 설계변경(정산) 사유

□ 횡단보도 설치요청 민원(국회의원, 시의원, 자치구, 민원인)에 따른 기본설계 대상지점 증가(당초 18개소 → 49개소)

□ 서울지방경찰청 교통안전시설 부결에 따른 실시설계 지점 감소

(당초 16개소 → 2개소)

□ 실시설계 감소 및 횡단보도 설치 물량 감소로 인한 모니터링 지점 감소

(당초 10개소 → 0개소)

□ 손해보험료 실정산에 따른 증감발생(증38,000원)

□ 조치계획

□ 위 보고내용과 같이 2014년 횡단보도 기본 및 실시설계 용역 설계변경 및 계약변경 요청(재무과)하고, 정산처리하고자 함

- 당초 계약금액 : 75,500,000원

- 변경 정산금액 : 75,500,000원(용역비 변동없음)

붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.