투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울시 어린이병원 삼성발달센터 계약변경(1차공사) 의뢰

1. 건축부-6697(2015.06.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사」에 대하여 아래와 같이 계약변경(1차공사)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사

나. 공사기간 :′15.01.20~′17.02.19 (1차 :′15.01.20~′16.01.19)

다. 계약금액 : 10,948,951,490원

라. 계 약 자 : 대자개발(주) 외 1개사

마. 계약변경 내용(1차 공사기간 변경)

구분		변경 전	변경 후	비 고
공사기간	총차	2015.01.20.~2017.02.19	변경없음	-
	1차	2015.01.20.~2016.01.19	2015.01.20.~2015.11.30	감 50일

붙임  1) 검토보고서 사본 1부.

2) 수정공정표 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이광백		의료시설과장	송종훈		건축부장	06/30 김우성
협조자	계약1팀장	김점선
시행	건축부-7367	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	nepdo@seoul.go.kr	/	대시민공개