문서번호	시설과-3134
결재일자	2015.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	代임록화	06/30 代서동선
협 조
	주무관		박진우

「서울가정행정법원 등 2개소」

옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역 완료 및 준공 정산 보고

2015. 6

동부공원녹지사업소

(시설과)

『서울가정행정법원 등 2개소』

옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역 완료 및 준공 정산 보고

서울가정행정법원 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역이 완료되어 아래와 같이 보고 드림.

□ 용역 개요

○ 용역 대상지 및 현황

용역명	위 치	사업비 (백만원)	면적 (㎡)	도급액 (천원)	착수일	준공일	도급자	비고
계		377.5	1,532.6	27,200
서울가정법원 옥상녹화·텃밭조성 실시설계용역	서초구 강남대로 193	290	876.6	14,700	2015.5.7	2015.6.20	형진조경(주) 대표 강이호
보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 실시설계용역	과천시 장군마을 3길 30	87.5	656	12,500	2015.5.7	2015.6.20	㈜조경이십일 대표 강정옥

□ 추진 경위

○ 2015.2.04 : 2015년 옥상녹화·텃밭조성 계획 시달(市조경과→동부공원녹지사업소)

○ 2015.2.24 : 건축물구조 안전진단 기술용역 타당성 심사 결과 통보

○ 2015.3.09 : 사업추진계획 수립

○ 2015.3.18~04.08 : 건축물구조 안전진단 용역 시행

○ 2015.4.15 : 실시설계 기술용역 타당성 심사 결과 통보

○ 2015.5.07 : 실시설계용역 착수

○ 2015.5.09 : 현장조사, 사전협의(서울가정행정법원)

○ 2015.5.12 : 현장조사, 사전협의(보건환경연구원)

○ 2015.6.02 : 계획안 협의 1차(보건환경연구원)

○ 2015.6.03 : 계획안 협의 1차(서울가정행정법원)

○ 2015.6.05 : 중간보고(서울가정행정법원, 보건환경연구원)

○ 2015.6.15 : 계획안 협의 2차(서울가정행정법원, 보건환경연구원)

○ 2015.6.16~17 : 전문가 자문

○ 2015.6.18 : 최종안 보고(보건환경연구원)

○ 2015.6.19 : 최종안 보고(서울가정행정법원)

○ 2015.6.20 : 용역준공

□ 최종 보고 결과

○ 일    시

- 보건환경연구원   : 2015. 6.18. 10시

- 서울가정행정법원 : 2015. 6.19. 10시

○ 장    소 : 동부공원녹지사업소

○ 참 석 자 : 사업소장, 시설과장, 시설팀장, 담당

○ 보 고 자 : 형진조경㈜ 임동혁 실장, ㈜조경이십일 선용춘 실장

○ 보고내용

- 최종 계획안, 자문결과, 시설별 상세계획 보고

○ 주요내용

- 서울가정행정법원

· 파라펫 조적플랜터 식재지 조성시 다양한 식재경관을 고려하여 식재 계획

· 스프링쿨러 계획시 지장물 등 살수 반경 고려하여 계획

- 보건환경연구원

· 텃밭 사이의 디딤목 폭을 줄여 계획 검토

· 전체 정형화된 식재 패턴적용 보다는 포트식재 구간은 자연스런 패턴 적용 검토

· 대기 정화식물, 공해에 강하면서 대기오염 물질을 잘 흡수 하는 식물 등을 검토하여            식재 교육의 장소가 될수 있도록 검토

· 벽면녹화 일부구간은 담쟁이 식재 검토

· 빗물저류조, 태양열발전기 적용은 건물구조적 문제와 실효성이 떨어지므로 건물            관리기관의 의견을 수렴하여 계획

- 공통

· 건물관리기관 의견을 수렴하고, 회의 내용을 검토하여 설계반영

□ 준공(정산)내역

○ 정산내역

용역명	계약금액(원)	정산금액(원)	정산내용	증감액(원)	비고
서울가정법원 옥상녹화·텃밭조성 실시설계용역	14,700,000	14,590,000	- 자문비 일부 미집행 정산 감액 300,000원→200,000원 부가세 감액	감110,000
보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 실시설계용역	12,500,000	12,390,000	- 자문비 일부 미집행 정산 감액 300,000원→200,000원 부가세 감액	감110,000

□ 향후 계획

○ 회의 내용 및 건물관리기관 의견을 반영 하여 공사 발주 시행

○ 서울가정행정법원 전기공사는 분리 공사 발주

○ 계약부서(공원운영과)에 준공 통보 및 준공처리

□ 향후 추진 일정

○ 2015. 7.        : 공사 발주

○ 2015. 8. ~ 10. : 공사 시행

○ 2015. 11.       : 관리기관 시설물 인계

붙임 : 1. 최종보고자료 각1부.

2. 자문의견서 각1부.

3. 준공(정산)내역서 각1부. 끝.