문서번호	급수운영과-4842
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
유명수		이경로	03/07 김광식
협 조
	시설관리과장			代홍갑표
	주무관			공문수

2014년 송,배급수관 정비사업 발주계획

2014. 3

강남수도사업소

(급수운영과)

2014년 송,배급수관 정비사업 발주계획

우리사업소에서 시행예정인 2014년 송․배급수관 정비사업에 대하여 세부시행계획을 수립하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		‘14년 예산배정현황

사업명	계	송배수관	세척갱생관	흑PE관	환경개선	불용관	비고
예산액 (천원)	8,758,350	5,200,000	2,295,000	528,000	234,350	501,000

Ⅱ		정비공사 추진계획

□ 송배수관 정비사업

○ 정비대상 : 3.3km

○ 추진방법 : 단위사업으로 발주 시행

○ 추진계획

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	발주예정	담당자	비고
계	D=400mm, L=850m	5,200
강남구청역~청담공원앞	D=400mm, L=850m	960	2014.3.~2014.12	2014.3	차승현
방배역~내방역간	D=500mm, L=750m	920	2014.3~2014.8	2014.3	강희창
서초역~교대역간	D=400~500mm, L=700m	820	2014.3~2014.8	2014.3	김영규
무지개아파트~사당역간	D=900mm, L=1,000m	2,500	2014.3.~2014.12	2014.3	권기섭

□ 세척갱생관 정비사업

○ 정비대상 : 3.0km

○ 추진방법 : 단위사업 및 연간단가(단가계약)사업으로 발주 시행

○ 추진계획

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	발주예정	담당자	비고
계	D=80~400mm, L=3,000m	2,295
역삼동 606-7외 2개소	D=80~400mm, L=1,668m	1,147	2014.3.~2014.7	2014.3	박홍선
서초동 1576-2외 2개소	D=80~300mm, L=1,182m	976	2014.3~2014.8	2014.3	김영규
연간단가(단가계약)	D=80~300mm, L=150m	172	2014.1~2014.12	연중

□ 흑PE관, 환경개선, 불용관 정비사업

○ 정비대상 : 2.48km

- 흑PE관 : 1.34km

- 환경개선 : 0.34km

- 불용관 : 0.8km

○ 추진방법 : 소규모로 산재되어 연간단가(단가계약)사업으로 발주 시행

Ⅲ		단위사업 세부 추진계획

○ 공사시행 순서

현장 조사	⇒	자체 설계	⇒	설계 심사	⇒	공사 발주	⇒	착공	⇒	설계 변경	⇒	준공

○ 분야별 세부시행 계획

구분	세부 일정 내용	비고
계획심사 (도면심사)	‘14.1.23 : 세척갱생관 도면심사(본부 누수방지과) ‘14.2.10 : 송배수관 도면심사(본부 배수과)
설 계	‘14.1 : 공사별 현장조사 ‘14.2 : 상수도공사 일위대가 작성(본부) ‘14.2 : 도로굴착 사업계획 심의(구청) ‘14.3 : 도로굴착 요청서 제출(구청) ‘14.3 : 설계완료
설계심사	- ‘14.3 : 설계심사 요청(본청 및 본부)
공사발주	‘14.3 : 설계심사 완료건 순으로 발주
착 공	‘14.3 : 공사계약 및 착공 ‘14.3 : 공사설명회 개최(공사건별) ‘14.3~12 : 공사장 안전 및 공정보고(월 1회)
예 비 준공검사	공사별 준공 한달~15일전 시행
설계변경	공사별 준공 15일 전 시행
준 공	공사완료된 공사건별 시행

끝.