문서번호	급수운영과-10317
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	이경재	06/30 전명수
협 조

급수공사 연기 보고(신설-112)

명에 의거 마천동외 13개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 조치계획을 보고합니다.

1. 공사 현황

○ 공 사 명 : 2014년 마천동외13개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 2015.02.05 ~ 2015.06.30

○ 계약금액 : 금221,254,530원

○ 계약상대자 : ㈜이문환경  대표 이우련

○ 급수공사 기한 연기 내역

지시번호	공사위치	공사개요	기존 공사기간	급수공사연기	연기사유
신설-112	문정동 87-8	구경 30㎜, 연장 4m	6.16~6.25	2015.7.15	신축공사현장 지연

2. 지체상금 부과여부 : 급수공사 수요가 요청으로 인한 급수공사 연기건이므로 지체상금 미부과코자 함.

3. 조치내용

- 상기와 같이 신축현장 사정으로 급수공사 작업지시기간 연기하여야 할 실정으나, 현재 ‘2014년 마천동외 13개동 상수도공사(2차)’ 계약업체인 ㈜ 이문환경의 계약기한이 2015년 6월 30일로 종료되므로, 본 작업지시건은 취소처리코자 하며,

- 현재 계약 진행중인 ‘2015년 마천동외 13개동 상수도공사(단가계약)’의 계약완료 및 착공 후  재작업지시하여 급수공사 민원업무 처리에 만전을 기하고자 합니다.   끝.