문서번호	설비부-7745
결재일자	2015.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	06/30 박기형
협 조
	교육사업지원팀장			代나정현

「서울시민 가족자연체험시설(제천)」 전기공사 발주계획 보고

2015. 6

도시기반시설본부

[설 비 부]

「서울시민 가족자연체험시설(제천)」

전기공사 발주계획 보고

서울시민들이 가족과 함께 자연을 체험할 수 있고 지방경제 활성화에 도움을 줄 수 있는 가족자연체험시설의 조성을 위하여  전기공사를 발주코자 함.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 서울시민 가족자연체험시설 전기공사(제천)

○ 공사기간 : `15. 7. ~ `15. 9.

○ 사 업 비 : 78,182천원

○ 위    치 : 충북 제천시 송학면 송한리 543번지 외 4필지

○ 규    모 : 시설부지 6,754㎡, 지상2층, 연면적 810㎡(교사 등 5동)

○ 공사개요

- 옥외 전기설비공사 1식

- 한전 인입설비공사 1식

- 동력, 전등, 전열공사 1식

- 방송설비 1식

2		추진경위

○ `15.03.05. : 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성 계획

○ `15.05.19. : 서울시민 가족자연체험시설 조성(대상지 확정) 계획

○ `15.06.17. : 공사 발주 의뢰(교육정책담당관 → 건축부)

○ `15.06.19. : 업무담당자 지정 통보(설비부 등 → 건축부)

3		예산조치

□ 공사비 현황

(단위: 천원)

구 분	총 공사비	비 고
합 계	78,182
전 기	78,182	도급, 관급, 이전비 포함

4		공사발주계획

□ 계약 관련 사항

○ 입찰방법 : 긴급입찰, 제한경쟁입찰(지역제한 : 충청북도)

- 충청북도 제천시에 소재하는 폐교를 활용하여 가족자연체험시설을 조성하는 시설로 금년도 여름부터 운영을 위한 공사로 긴급발주가 필요

○ 공사기간 : 착공일로부터 60일

○ 현장설명 미실시

○ 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일      (낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 충청북도 지역에 소재한 자 이어야 함.

□ 관련 규정

○ 긴급공고 : 지방계약법 시행령 제35조 제4항

○ 제한경쟁 : 지방계약법 제9조 및 같은법 시행령 제20조

○ 현장설명 미실시 : 지방계약법 시행령 제15조 제3항

○ 낙찰자 결정방법 : 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준 제2장

- 안전행정부예규 제19호, ‘15. 4. 10.

○ 하자보증기간 : 지방계약법 시행규칙 제68조 별표 1에 의함

5		관급자재 구매계획

품 명	규 격	수량	비 고
보안등주	철재, 5m, 1등용	7본	제3자단가계약
LED램프	LED 50W	7개	제3자단가계약

6		향후 추진계획

○ `15.07. : 공사 계약 및 착공

○ `15.09. : 공사 완료

붙임 : 1. 사업계획 방침서 1부.

2. 예정공정표 1부.  끝.