문서번호	총무과-10744
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	06/30 이상국
협 조
	주무관			임봉순

본부청사 부서 재배치(칸막이) 공사기간 연장

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				22백만원

2015. 6. 29

한강사업본부

총 무 과

본부청사 부서 재배치(칸막이) 공사기간 연장

조직개편 및 부서 재배치 계획에 따라 칸막이 공사 시행 중 부서 재배치 외 별관 공무직 휴게실 설치 및 창고 이전 등 공사가 지연됨에 따라 공사 기간을 연장하고 청소근로환경개선 지원 예산을 재배정 받아 집행하고자 함

■ 공사기간

❍ 당 초 : 2015. 6.24 ~ 7.3

❍ 변 경 : 2016. 6.24 ~ 7.10 (연장기간 : 1주일)

■ 사업내용

❍ 부서 재배치에 따른 경량칸막이 공사

- 경량칸막이 공사 : 기존칸막이 이전 및 신규설치

- 벽체 철거 : 콘크리트 및 경량벽체 철거, 출입문 설치

■ 소요예산 : 21,560천원(부가가치세 포함)

❍ 예산과목

- 당 초 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

- 변 경 : 자체예산(한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비)

지원예산(노동존중문화 정착, 근로자 복지 증진, 청소근로환경시설 개선, 시설비)

■ 추진계획

❍ 2015. 6.23 ~ 6.26 : 방침·공사 발주 및 계약

❍ 2015. 6.27 ~ 7.10 : 공사 착공 및 추진

❍ 2015. 7.10 : 공사 준공(예정)