문서번호	토목부-13460
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	06/30 노우성
협조
	주무관		유근평

LH서초아파트 앞 빗물받이 인상 시행 검토 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시기반시설본부

토 목 부

LH서초아파트 앞 빗물받이 인상 시행 검토 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

LH서초5단지아파트 앞 양재대로 상 빗물받이 단차 발생으로 인한 불편민원을 해소하고자 맨홀인상에 대해 검토 보고 드림

관련근거

❍ 동기강 2015-339호(`15. 6.22.) 빗물받이 인상 및 포장공사 승인 요청

❍ 도시기반시설본부-15-2419호(`15. 4.30.) 민원사항 조치 촉구

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (9차: 25,000백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7.31.(9차 `15.3.10.~`15.12.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

현황 및 보고내용

❍ LH서초5단지아파트 앞 양재대로 상 빗물받이 단차 발생으로 인해 교통안전사고 발생 우려 및 불편 민원이 다수 발생하고 있어

❍ 빗물받이 5개소에 대해 맨홀 인상이 필요한 실정임.

❍ 현 황 도

❍ 주요 공사 내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	비 고
빗물받이 인상	400×1000×50	개소	-	5
도로 포장	#78	m2	-	264

❍ 공사비 증･감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증･감	비 고
배수공	-	1,664	1,664
포장공	-	4,422	4,422
부대공	-	1,003	1,003
직접공사비	-	7,089	7,089
간접공사비	-	1,147	1,147
공급가액	-	8,236	8,236
부가가치세	-	824	824
총 공 사 비	-	9,060	9,060

조 치 계 획

❍ 감리단 검토의견에 따라 실정보고 건에 대해 승인·통보하고 설계변경 시 반영하도록 조치하고자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.