서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	동호대교 남단 진입램프 개량공사 설계변경(최종) 시행

1. 시설관리공단 공사감독2처-8989호(2015.6.29.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리부서에서 시행중인 『동호대교 남단 진입램프 개량공사』제2회 설계변경(최종)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 동호대교 남단 진입램프 개량공사

나. 공사기간 : 2014.07.16. ~ 2015.06.30.

다. 총공사비 : ￦1,261,497,500원

(도급비 : 1,115,488,880원, 관급비 : 107,268,000원,

이전비 : 38,740,620원)

라. 도 급 자 : ㈜두양종합건설 대표 김병주

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총공사금액	1,261,497,500	1,183,820,610	감)77,676,890
도급비	1,115,488,880	1,096,395,000	감)19,093,880
관급비	107,268,000	87,425,610	감)19,842,390
이전비	38,740,620	0	감)38,740,620

바. 예산과목

(1) 교량관리, 한강교량관리, 동호대교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

(2) 교량관리, 한강교량관리, 한강교량 일상유지보수공사, 시설비및부대비

시설비

사. 설계변경사유 : 지장물이설, 가설교량 수량산출 및 내역서 누락 추가, 교통통제 부분 승인에 따른 포장 및 신축이음장치 물량 조정(감), 공사기간 연장에 따른 강재손료 반영, 제비율 정산등

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

주무관	우창원		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	06/30 이용심
협조자	계약1팀장	김점선
시행	교량안전과-11724	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개