문서번호	도로보수과-6014
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		김권일	06/30 조병준
협조

제3차 작업지시 관련 실정보고서(2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가))

2015. 06.

작업지시 관련 실정보고(제2차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2015.03.24 ~ 2015.12.31

○ 시 공 사 : 엘씨씨건설㈜ 대표 심 강 보

○ 도 급 비 : 금344,148,470원

□ 보고내용

○ 관할 경찰서 요청 및 담당자 순찰 : 의사당로(KDB산업은행~현대캐피탈) 외 2개소

○ 경찰청 규제심의에 따른 신설 건 : 7건

○ 120 등 민원 접수 건 : 11건

○ 보수대상 및 물량

-별첨 작업지시서 참조

□ 조치계획

○ 위 노면표시 신설 및 재도색 대상을 교통안전시설(노면표시) 유지보수(연간단가) 업체에 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

-제3차 작업지시

- 작업위치 :의사당로(KDB산업은행~현대캐피탈) 재도색 외 20건

- 작업기간 : 2015.07.01 ~ 07.31

- 공종 및 물량 : “별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약50,215천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 원)

공 사 명	도 급 비	기 시공	금회사용 (3차)	비고 (잔액)
2015년 교통안전시설 (노면표시)유지보수공사 (연간단가)	344,148,470	157,592,600	50,215,000	136,340,870

첨  부 1. 제2차 작업지시서 및 내역서 1부.

2. 구간표(별첨) 1부. 끝.