서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	물순환 효과분석 및 인프라구축기술 개발연구용역 준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인 ‘물순환 효과분석 및 인프라구축기술 개발연구 용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의회하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내용

용역명	계약자	용역기한		연기사유
		당초	변경
물순환효과분석 및 인프라구축기술개발	한국건설기술연구원외 2	2015.7.25	2015.11.25	· 용역 착수 후 시설설치에 따른 효과분석에 필요한 강우횟수 및 강우량 부족으로 인하여 인공적인 살수 등을 통한 효과를 분석 중이나 실제 강우에 따른 검증 필요 · 실제 강우에 의한 효과를 분석하고자 금년 우기중 지속적인 모니터링 및 분석 기간이 필요함

나. 귀책사유 : 서울특별시 (지체상금 미부과)

붙임  1) 준공기한 연기보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 1부(별도송부). 끝.

	물관리정책과장
주무관	이두환		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	06/30 배광환
협조자
시행	물관리정책과-10839	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 (서소문동 37) 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3852	/전송	02-2133-1041	/	ldh88@seoul.go.kr	/	대시민공개