문서번호	건축부-7435
결재일자	2015.6.30.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김민호		신명승	06/30 김우성
협조	지방시설사무관대우		차무흥
	주무관		이석우

- 재사용플라자 건립공사 -

사토장 선정관련 설계변경 검토 보고

2015. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

- 재사용플라자 건립공사 -

사토장 선정관련 설계변경 검토 보고

우리본부에서 시행 중에 있는『재사용플라자 건립공사』와 관련, 사토장 선정을 위한 책임건설사업관리기술자의 승인요청에 대한 검토보고

Ⅰ

관 련 근 거

□ PC재사용15-160호(2015.6.24.)

❍ 사토장 선정 실정보고

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

❍ 제1장 제7절 실비산정, 제13장 공사계약일반조건

Ⅱ

실정보고 내용

□ 사토장 선정 사유

❍ 설계서 상 사토장이 별도 지정되지 않음 (거리50km로 반영)

❍ 단가산출서 상 김포매립지로 산출 (거리50km)

- 수도권 매립지 토사반입 불가 [매립지관리처-982(2015.5.13.)]

❍ 토석정보공유시스템 확인 결과 사토 반출 시기가 부합되지 않음

□ 건설사업관리단 검토의견

❍ 운반거리 변경(50km → 20.23km, 32.15km)에 따라 지방자치단체 입찰

및 계약집행기준, 공사계약 일반조건에 의거 설계변경 필요

- 기존 운반로와 중첩되는 1.72km에 대해서는 계약단가 적용

- 대체된 운반로에 대해 신규단가 적용(협의율 90.718%)

❍ 공사비 증·감 내역                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
공사비	258,368,800	631,120,417	증)372,751,617
제경비 (부가세포함)	103,363,237	236,107,854	증)132,744,617
계	361,732,037	867,228,271	증)505,496,234

Ⅲ

처 리 방 안

❍ 설계서상 사토장이 미지정되고 단가산출서 상 반영된 김포매립지도“점질토사 및 부식토”로 인하여 반입 불가하며, 토석정보공유시스템 확인 및 타기관 사토반입여부 조회(건축부-5587, 2015.5.15.)결과 적정한 사토장이 없으므로 책임건설사업관리기술자의 검토의견에 따라 민간 사토장을 선정함

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제7절 실비산정 및 제13장 공사계약일반조건에 의거 운반거리 변경에 따른 공사비 증액이 필요함

※ 내역입찰 당시 사토단가를 낙찰율보다 낮게 투찰하였으며 이에 따라 운반거리가 감소하였으나 신규단가 적용 시 공사비가 증가함

구 분	설계단가	계약단가	전체낙찰율(%)	단가낙찰율(%)
토사운반 (백호상차)	20,835	4,205	81.437	20.182
토사운반 (크람쉘상차)	21,422	4,330	81.437	20.212

❍ 증가된 공사비는 추후 설계변경 시 반영토록 하고 신규 선정된 사토장으로 토사 반출을 승인하고자 함

붙임 : 사토장 승인 요청 공문 1부.    끝.