서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	동호대교 남단 진입램프 개량공사 설계변경에 따른 계약의뢰

1. 교량안전과-11724호(2015.6.30)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리시에서 시행중인『동호대교 남단 진입램프 개량공사』에 대하여  설계변경에 따른 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동호대교 남단 진입램프 개량공사

나. 공사기간 : 2014.7.16. ~ 2015.6.30.

다. 도 급 액 : ￦1,115,488,880원

라. 도 급 자 : ㈜두양종합건설 대표 김병주

마. 예산과목

1) 교량관리, 한강교량관리, 동호대교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

2) 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상유지보수공사, 시설비 및 부대비

시설비

바. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총공사금액	1,261,497,500	1,183,820,610	감)77,676,890
도급비	1,115,488,880	1,096,395,000	감)19,093,880
관급비	107,268,000	87,425,610	감)19,842,390
이전비	38,740,620	0	감)38,740,620

사. 설계변경사유 : 지장물이설, 가설교량 산출산출 및 내역서 누락 추가, 교통통제 부분 승인에 따른 포장 및 신축이음장치 물량조정(감), 공시기간 연장에 따른 강재손료 반영, 제비율 정산 등

붙임 : 관련서류 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	우창원		특수교량팀장	代임동운		교량안전과장	06/30 이용심
협조자
시행	교량안전과-11784	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개