문서번호	기전과-8029
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★		기전과장	강서도로사업소장
홍승찬		박재경	07/01 조병준
협조
	주무관		박태진

「2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)(통합,규제처리)」

설계변경(1차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

강서도로사업소

(기전과)

「2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)(통합,규제처리)」

설계변경(1차) 계획보고

보행신호 음성안내 보조장치 설치을 위한 예산이 추가 배정됨에 따라, 신속한 설치를 위하여「2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)(통합,규제처리)」공사 물량에 포함하여 추진하고자 합니다.

Ⅰ		추 진 근 거

○ 보행신호 음성안내 보조장치 설치계획

【교통운영과-11267(2015.6.12.)】

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2015년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)(통합,규제처리)

○ 총사업비 : 423,000천원

- 도급비 383,000천원  관급비 30,000천원  이전비 10,000천원

○ 계약금액 : 333,056,580원

○ 계약일자 : 2015년 03월 06일

○ 공사기간 : 2015. 03. 13. ~ 2015. 12. 31.

○ 시공업체 : 선우전기 대표자 조남국

○ 감리업체 : ㈜영호이앤씨 대표자 정숙영

Ⅲ		보행신호 음성안내 보조장치 설치 계획

○ 설치 목적 : 보행자의 무단횡단 예방 및 교통안전사고 예방

○ 추가 배정예산 : 80,000천원

- 예산과목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통안                 전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비 및 부대비, 시설비.

○ 보행자 음성안내 보조장치 설치 대상지 (총 4개소)

▶ 현재 확정장소(2개소)

연번	교차로명(t-gis)	위치	비고
1	월정초교정문앞	강서구 화곡1동 374	서울지방경찰청 규제심의 완료 (15.05.14)
2	송화초교(보)	강서구 방화대로 319 길성그랑프리텔아파트 앞	서울지방경찰청 규제심의 완료 (15.05.14)

▶ 향후 추진 예정지(2개소)

- 2015년 8월경 서울지방경찰청 규제심의 예정임(교통운영과 추진)

연번	교차로명(t-gis)	위치	비고
1	경원극장(보)	영등포구 영등포로 253 (영등포동2가 175 경원스파랜드 앞)	서울지방경찰청 규제심의 예정 (15.8월경)
2	신정네거리역	양천구 신정동	서울지방경찰청 규제심의 예정 (15.8월경)

Ⅳ		예산집행 세부계획

○ 보행신호 음성안내 보조장치 설치 추진

-「교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)(통합,규제처리)」도급비         에 80,000천원을 증액 설계변경하여 신속히 설치 추진

(단위 : 원)

공 사 명	구 분	총 공사비		증・감	비고
		변경(전)	변경(후)
총 액		373,056,580	453,056,580	(증)80,000,000	추가배정예산 80,000천원
교통신호기 신설 및 개량공사 (연간단가) (통합,규제처리)	도 급 비	333,056,580	413,056,580	(증)80,000,000
	관 급 비	30,000,000	30,000,000	-
	이 전 비	10,000,000	10,000,000	-
	총공사비	373,056,580	453,056,580	(증)80,000,000

Ⅴ		보고자 의견

○ 어린이 보호구역내 안전사고 예방을 위하여 설치하는 사항으로,         「보행신호 음성안내 보조장치」의 신속한 설치로 안전한 등하굣길을       조정하여 어린이 교통 안전사고를 예방하고자 「2015년 교통신호기       신설 및 개량(연간단가)(통합,규제처리)」공사물량에 포함시켜 조속히       시행하고자 합니다.

붙임 : 1. 2015년 교통신호기분야 사업추진을 위한 예산 추가배정 공문 1부.

2. 보행신호 음성안내 보조장치 설치계획 관련 공문 1부.  끝.