문서번호	조경지원과-4083
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장
임은희		07/01 김제중
협 조
	주무관			이전호
	주무관			박종천

<2015년 천호공원 외 1개소 정비공사> 설계 변경계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

동부공원녹지사업소

조경지원과

「2015년 천호공원 외 1개소 정비공사」

설계변경계획 검토보고

「2015년 천호공원 외 1개소 정비공사」와 관련 현장 여건 변경 및 공원이용객 안전사고 예방을 위한 설계변경사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 2015년 천호공원 외 1개소 정비공사

계 약 일 : 2015. 5 .18

공사기간 : 2015. 5 .18 ~ 7. 1

계약금액 : 금13,700,000원(금일천삼백칠십만원정)

도 급 자 : ㈜스마일그룹 대표 권민정 (영등포그 신길동 245-28)

주요공종 : 고무칩포장, 목재데크설치, 집수정설치, 야외운동기구 설치, 황토 포장 등

Ⅱ		설계변경내역

변경사유

- 현장여건 및 공원이용객 안전사고 예방을 위해 물량 변경 및 공종추가

공원이용객들의 통행 불편을 최소화하기 위해 고무칩 균열 보수물량을 최소화하여 보수시행하고 야외무대 담장에 아이들이 자주 올라가 떨어지는 사례가 있어 안전사고 예방을 위해 야외무대 벽 목재 설치

주요변경내역

공종별	설 계 변 경 내 용	비 고
시설물공사	○ 현장여건 변경 및 공원이용객 안전사고 예방을 위한 물량 조정 및 공종 추가 - 고무칩포장 102㎡ → 40㎡ - 야외무대 벽 목재설치 0m → 17.6m

공사비 변경내역 : 도급금액 변경없음.

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		58,803,300	58,792,320	-10,980
도급비	공급가액	12,454,000	12,454,000	0
	부가가치세	1,245,454	1,245,454	0
	계	13,700,000	13,700,000	0
관급자재비		45,103,300	45,092,320	-10,980	조달수수료 변경

Ⅲ		조치계획

설계변경 내용은 계약부서 및 시공업체에 변경계약토록 조치하고자 함.

붙  임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 제비율검증표. 1부.  끝.