투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	전면책임감리용역 설계변경(총괄3회, 3차1회) 계약 의뢰

1. 우리본부에서 시행중인 『신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임감리용역』에 대하여 설계변경(총괄3회, 3차 1회) 계약 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임감리용역

나. 용 역 비 : 3,439,460천원 (3차 : 1,545,000천원)

라. 용역기간 : ‘13.1.7∼‘16.6.24 (3차 :‘15.3.1~‘16.6.24)

마. 용 역 사 : ㈜수성엔지니어링외 4개사

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감
용역 금액	총괄	3,439,460천원	3,551,460천원	증112백만원
	3차	1,545,000천원	1,657,000천원	증112백만원
용역 기간	총괄	‘13.1.7∼16.6.24	‘13.1.7∼‘16.6.24	변경없음
	3차	‘15.3.1∼16.6.24	‘15.3.1∼‘16.6.24	변경없음

사. 변경사유

○ 일반회계 예산으로 반영된 안전전담 상주기술자 투입(증112백만원)

○ 상주기술자의 투입시기를 준공시까지 조정(용역금액변경없음)

아. 예산과목

○ 도시안전본부 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 신월 빗물저류배수시설 설치, 시설비및부대비, 감리비.

○ 도시기반시설본부, 도시기반시설관리(일반회계), 공사장 안전관리대책추진, 감리비(증액분 112백만원).

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 합의각서 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박찬표		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	07/01 임춘근
협조자	주무관	이병환		계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-8728	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울 중구 청계천로8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	3708-8775	/전송	3708-8756	/	p25800@seoul.go.kr	/	대시민공개