문서번호	기술심사담당관-11584
결재일자	2015.7.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술관리팀장	기술심사담당관
장현철		조현석	07/02 김홍길
협조

2015년 상반기 교통분야 설계심의 사후평가 결과보고(제2차~제6차, 제8차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
건설기술심의위원회 조례 제11조제2항		-

2015. 7.

서 울 특 별 시

기술심사담당관

2015년 상반기

교통분야 설계심의 사후평가 결과보고

2015년 상반기 교통분야에 대한 설계심의 사후평가(제2차~제6차, 제8차)를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 개   요

❍ 시행근거

- 서울특별시건설기술심의위원회 조례 제11조 제2항

-「2015년 설계심의 사후평가 시행계획 수립」(기술심사담당관-8443호, ‘15.5.11.)

-「2015년 상반기 교통분야 설계심의 사후평가 시행계획 통보」

(기술심사담당관-9238호, ‘15.5.21.)

❍ 평 가 일 : 2015.6.11.(목) ~ 6.16.(화)

❍ 평가대상

- 설계심의를 받은 총 공사비 50억원 이상 건설공사 중 ‘15. 6월 현재 공정율 30~70%인 교통분야 건설공사 6건

연번	공 사 명	공사비 (억원)	공사기간 (평가일)	공정률	시공사	시행기관	비고
1	청진구역 도시환경정비사업관련 광화문 지하공공보도 설치공사	357	‘14.3.~‘15.12. (‘15.6.11.)	68%	대림산업㈜	종로구	제2차
2	한남동 공영주차장 건설공사	233	‘14.4.~‘16.4. (‘15.6.11.)	35%	㈜KCC건설	용산구	제3차
3	독서근린공원 지하주차장 건설공사	95	‘14.5.~‘15.11. (‘15.6.12.)	55%	영신종합건설	양천구	제4차
4	고척근린공원 지하주차장 건설공사	118	‘14.4.~‘15.12. (‘15.6.12.)	60%	㈜삼일기업공사	구로구	제5차
5	고가교(신림~신대방, 4호선 시점~당고개) 내진보강 및 방음벽 교체공사	85	‘13.3.~‘16.3. (‘15.6.16.)	57%	㈜콘크리닉	서울메트로	제6차
6	고가교(대림~신도림) 내진보강 및 방음벽 교체공사	83	‘13.6.~‘16.6. (‘15.6.16.)	33%	㈜자오건설	서울메트로	제8차

※ 당초 계획된 ‘잠실나루역~잠실역 등 2개구간 방음벽 교체 및 내진보강공사’의 경우 민원발생 등으로 인하여 평가대상 공정율에 미달함에 따라 하반기에 실시 예정

□ 평가내용

❍ 설계심의 시 지적사항 이행실태 점검(이행여부, 적정성 등)

❍ 시공(품질)관리, 안전․환경관리, 교통․보행관리

❍ 기타 설계․시공 관련 기술지도 및 자문 병행 실시

□ 평가방법

❍ 전문분야별 평가단을 구성 시공실태 등에 대한 절대평가를 실시

❍ 설계심의시 지적사항 이행실태 점검과 기술지도(자문)

❍ 현장점검과 병행하여 실시

□ 평가단 구성

연번	분 야	소 속	직 위	성 명	비고
1	토질및기초	수성엔지니어링	부 사 장	강 병 윤
2		한맥기술	부 사 장	박 윤 규
3	토목구조	도화엔지니어링	부 사 장	유 제 남
4		동일기술공사	부 사 장	최 장 환
5		우설엔지니어링	대표이사	최 영 구
6	토목시공	경동엔지니어링	부 사 장	김 양 중	위원장
7		진우엔지니어링	부 사 장	안 삼 현

□ 평가결과

구 분	위원별 평가 내역							총점	최종평가
	강병윤	박윤규	유제남	최장환	최영구	김양중	안삼현	평점	(A～D)
청진구역 도시환경정비사업관련 광화문 지하공공보도 설치공사	**	**	**	*	**	**	**	***	*
								****
한남동 공영주차장 건설공사	**	**	**	*	**	**	**	***	*
								****
독서근린공원 지하주차장 건설공사	**	**	*	**	**	**	**	***	*
								****
고척근린공원 지하주차장 건설공사	**	**	*	**	**	**	**	***	*
								****
고가교(신림~신대방, 4호선 시점~당고개) 내진보강 및 방음벽 교체공사	**	**	**	*	**	**	**	***	*
								****
고가교(대림~신도림) 내진보강 및 방음벽 교체공사	**	**	**	*	**	**	**	***	*
								****

□ 평가결과 조치

❍ 평가결과 및 현장점검 지적사항을 사업시행부서에 통보하여 시정조치

- 부실시공 발견시 발주부서에 벌점부과 등 행정조치토록 통보

- 수범사례는 발굴하여 타 기관(부서) 전파

※ 평가결과 인센티브 없음(‘14.12.30. 건설공사 시공 및 종합평가 지침 개정)

□ 평가사진

청진구역 도시환경정비사업관련 광화문 지하공공보도 설치공사

한남동 공영주차장 건설공사

독서근린공원 지하주차장 건설공사

고척근린공원 지하주차장 건설공사

고가교(신림~신대방, 4호선 시점~당고개) 내진보강 및 방음벽 교체공사

고가교(대림~신도림) 내진보강 및 방음벽 교체공사

붙 임	1. 사후평가 총괄표 1부.
	2. 회의록 각1부.
	3. 사후평가 종합의견 각1부.
	4. 사후평가 채점표 각1부.
	5. 공사장 관리실태 점검결과 1부.
	6. 위원별 점검결과 지적사항 각 1부. 끝.