	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사기간 연장 계약 의뢰(본부청사 부서 재배치(칸막이) 공사)

1. 총무과-10590(2015.6.29)호와 관련입니다.

2. 본부청사 부서 재배치를 위한 칸막이 공사 진행 중 아래와 같이 공사기간  연장 사유가 발생 공사계약 기간을 연장 하고자 합니다

- 아    래 -

가. 계약건명 : 본부청사 부서 재배치(칸막이) 공사

나. 도 급 비 : 증감 없음 (19,404,000원 / 부가세 포함)

다. 시 공 사 : ㈜세현디엔씨  (대표 : 유은식)

라. 계약기간 변경내용

- 당초 : 2015.6.24. ~ 2015.7.3

- 변경 : 2015.6.24. ~ 2015.7.10. (연장기간 7일)

※ 연장사유 : 부서 재배치 위치 변경에 따른 작업 지연 및 추가작업

※ 귀책사유 : 한강사업본부

※  지체상금 : 미부과

마. 예산과목

- 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비 (5,797,000원)

- 노동존중문화 정착, 근로자 복지 증진, 청소근로환경시설 개선, 시설비 (13,607,000천원)

붙임 계약기간 연장 보고서 1부. 끝.

주무관	강상천		총무과장	07/02 최대봉
협조자	주무관	임봉순
시행	총무과-10941	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 (성동구 강변북로 257)	/
전화	02-3780-0727	/전송	02-3780-0740	/	kangmul@seoul.go.kr	/	대시민공개