문서번호	급수운영과-15597
결재일자	2015.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		07/02 조면행
협 조
	주무관			이상무

급수공사 작업지시 변경보고

2015. 7

강서수도사업소

(급수운영과)

「2014년 구로1동외 6개동 상수도공사(단가계약)」

급수공사 작업지시 변경보고

구로구 관내 급수공사를 위하여 시행하고 있는 『2014년 구로1동 외 6개동 상수도공사(단가계약)』의 공사가 준공됨에 따라, 미 완료(사유: 공사기한 연기)된 공사건에 대하여 아래와 같이 작업지시 변경 시행코자 합니다.

2015.  07.  02.

보고자 : 시설7급  성명  박 경원

□ 공사 현황

○  공 사 명 : 2014년 구로1동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○  공사개요 : D=15~300mm, L=775m

○  착 공 일 : 2014. 07. 08         라. 준공기한 : 2015. 06. 30

○  도 급 자 : ㈜서울포장 대표 이영숙

○  계약금액 : 금206,140,000원

□ 보고 내용

○ ‘14년 단가계약 공사인 『2014년 구로1동 외 6개동 상수도공사(단가계약)』의 공사         준공(’15.06.30) 되었으며,

○ ‘15년 “구로1동외 6개동”에 대한 단가계약 공사를 위한 신규 발주공사 진행중으로,        공사계약 및 실 착공까지는 1주일 이상 기간이 소요될 것으로 판단됨.

○ ‘14년 단가계약 공사건으로 신축건물 급수공사 기 작업지시 되었으나, 현장여건 및        수요가 요청에 의한 공사 연기되어 미 완료된 공사가 있음.

- 미완료 공사현황

연번	위치	작업지시현황		미완료 사유
		지시번호	공사개요
1	구로1동 642-88	신설72	D=50mm, L=5m	현장 자재적치 및 외부비계 미철거등에 따른 공사기한 연기(기간:6.12~6.30까지)

□ 조치 계획

○ 상기 급수공사와 관련하여 민원인이 4~5일 내 인입공사 재 요청된 실정으로,

○ ‘14년도 단가계약 공사 준공에 따른 ’15년 신규공사 계약 진행중이나 실 착공까지        는 1주일 이상 기간이 소요될 것으로 판단됨.

○ 이에 따라 공사의 시급성을 감안하여 ’15년 단가계약 공사건으로 공사 진행중           “2015년 고척1동외 7개동 상수도공사(단가계약)” 시공사에 공사토록 작업지시 변         경하여  공사시행 및 민원해소에 만전을 기하고자 합니다.  끝.