	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구로소방서 승강기 설치 및 안전센터 보수보강공사 실정보고서 접수

1. 관련근거

○ 하웅종합건설(주) 하웅 15-20호(2015. 7. 3.)『구로소방서 승강기 설치 및 안전센터 보수보강공사 실정보고』

○ 행정자치부 예규 제20호(2015. 4. 10.)『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경』

2. 위와 관련 우리서 승강기 설치 및 안전센터 보수보강공사 시공 중 현장여건 변동 및 설계누락 부분에 대하여 시공사로부터 아래와 같이 설계변경 실정보고 사항이 접수되어 내용확인 후 선시공 승인후 회계규정에서 정한 절차에 의거 변경하고자 합니다.

가 계약건명 : 구로소방서 승강기 설치 및 안전센터 보수보강공사

나. 계약사항

○ 계약자 : 하웅종합건설(주) 대표 조연하(금천구 가산디지털2로 53)

○ 계약금액 : 금124,839,420원

○ 계약기간 : 2015. 5. 26. ~ 2015. 8. 31.

다. 실정보고사항

위 치	변 경 전	변 경 후
E/V설치	• 외부마감 : 유리TPG시스템 • 외벽도색 및 지장물 철거 미반영	• 외부마감 : 유리 커튼월시스템 • 외벽도색, 스틸홈통철거, 가스환기기배관 이전설치
독산센터1층	•천장철거 후 MDF2겹시공 후 도색	•천장 기존 알미늄판넬 세척후 재사용
독산센터2층	•진압대기실 조적벽 철거 미적용 •벽체 바탕면고르기 미적용 •걸레받이, 바닥비닐쉬트 미반영 •여직원 대기실내부 방턱 미적용 •대기실 출입문, 창고출입문 교체	•진압대기실 조적벽 철거(대기실 협소 해소) •벽체 바탕면고르기 퍼티작업 •걸레받이, 바닥비닐쉬트 지정색 깔기 적용 •여직원 대기실내부 방턱 900*1000설치 •대기실 출입문, 창고출입문 기존사용
독산센터3층	•체력단련실과 의소대사무실 벽체 누락 •식당 주방 타일철거 및 방수	•체력단련실과 의소대사무실 벽체 신설(창호) •식당 주방 타일부착 변경

독산센터3층	•창고 냉난방배관 노출 •물탱크실 FRPa물탱크 및 배관철거 누락	•창고 냉난방배관 노출부분 드라이월설치 •물탱크실 FRPa물탱크 및 배관철거 적용
외부	•냉난방 실외기 콘크리트패드 누락 •후정 오배수관 보수 미적용	•냉난방 실외기 콘크리트패드 적용 •후정 오배수관 굴착후 교체

라. 조치계획 : 임시청사 운영으로 직원의 불편해소 등을 위하여 시공업체

통보 사무실, 대기실부분에 대하여는 선시공토록 조치하고 그이외에 대하여는 설계도서 작성  내역 확인하여 예산범위내에서 변경

붙임  시공사 실정보고서 사본 1부.  끝.

담당자	천완주		장비회계팀장	代천완주		소방서장	07/03 김송연
협조자
시행	소방행정과-9448	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02)2618-3103	/전송	02)2616-1919	/		/	대시민공개