문서번호	공간정보담당관-7226
결재일자	2015.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
이용익		김태준	07/03 조봉연
협조

2015년 서울형 지도태깅과 공간정보 플랫폼 활용 확산 사업 월간 보고(6월)

2015.7.3.

공간정보담당관

월간업무보고서
사 업 명		2015년 서울형 지도태깅과 공간정보 플랫폼 활용 확산 사업
기 간		2015.6.1.~2015.6.30.		보 고 일	2015년 7월 3일
수 신 처		부 서	서울시 공간정보담당관	담 당	이용익 주무관
발 신 처		회 사	(주)다울지오인포	담 당	김재호 부장
주 요 내 용		○ 요구사항정의서 작성 ○ 다국어 지도 현행화 ○ 신규테마: 서울의정책, 메르스진료병원 등
1. 주요 진행 사항
항목	주요 사항					진행일
사업 운영	○ 요구사항정의서 작성 ○ WBS 작성 ○ 위치 참조 체계 스토리보드 작업					2015-06-04 2015-06-04 2015-06-29
개발 / 구현	○ 다국어지도 현행화 - 국토지리정보원 ‘바로 e맵’ : 샘플 데이터(배경지도 및 국문 POI) 분석 작업 - 다국어 POI 번역 작업 - 다국어 POI 번역 / 도로명주소 업데이트 ○ 회원 인증 다원화 작업 - 페이스북 회원 인증 체계 변경 - 네이버 회원 인증 체계 개발 ○ 웹 취약점 보완 작업					2015-06-30 2015-06-30 2015-07-30 2015-07-10 2015-07-22
콘텐츠 운영	○ 신규 테마 - 서울의 정책 (시장 요청 사항) - 메르스 진료병원 - 광복70주년 (광복70주년 기념사업추진위원회) ○ 갱신 테마 - 한강행복몽땅 (한강사업본부) - 여름녹음길 (조경과)
업무 협의	○ 예산과 연동 관련 업무 지원 미팅 ○ 서울시 디자인 거버넌스 프로젝트 관련 미팅					2015-06-11 2015-07-02

2. 금월 업무 진행 현황

서울형 지도태깅과 공간정보 플랫폼 활용 확산

		업무 진행 현황	진행일정	진행 여부
분석/계획		○ 요구사항정의서 작성 ○ WBS 작성 ○ 위치 참조 체계 스토리보드 작업 ○ 스마트서울맵 / 공유마당 개선안 기획	~ 6/4 ~ 6/4 ~ 6/29 6/30 ~	100% 100% 100% 10%
구축		○ 다국어지도 현행화 - 국토지리정보원 ‘바로 e맵’ : 배경지도 및 국문 POI 분석 작업 - 다국어 POI 번역 작업 영문 : 640개 일문 : 644개 중문(간체) : 645개 중문 (번체) : 649개 - 다국어 POI 번역 / 도로명주소 업데이트 ○ 회원 인증 다원화 작업 - 페이스북 회원 인증 체계 변경 - 네이버 회원 인증 체계 개발 ○ 웹 취약점 보완 작업	~ 6/30 ~ 7/1 ~ 7/10 ~ 7/22	100% 100% 50% 10%
운영	일반 운영	○ 외부 IP 차단 작업 - CMS 접근 외부 IP 차단 작업	6/26	100%
	App 운영	○ 앱 로그 적용 작업 - 문서 및 범위 확인 - 해당 업체에게 라이브러리 파일 요청, 협의 후 이양하겠다는 통보 받은 상태 - 협의에 따라 진행 예정	6/30	20%
	OpenAPI	○ 서울시 예산과 연동 관련 업무 지원 - 회의 : 6월 11일 - 연동규격서 및 구축 업무 지원 ○ 서울시 디자인 거버넌스 프로젝트 관련 미팅 - 연동규격서 및 샘플 데이터 이양	6/11 7/3	100% 100%
지도태깅 콘텐츠		○ 신규 테마 - 서울의 정책 (시장 요청 사항) - 메르스 진료병원 - 광복70주년 (복지정책과) ○ 갱신 테마 - 한강행복몽땅 (한강사업본부) - 여름녹음길 (조경과)		완료

3. 익월 업무 진행 사항

		업무 진행 현황	진행일정	진행 목표
분석/계획		○ 이미지 지도태깅 구축 기획 ○ 스마트서울맵 / 공유마당 개선안 기획	~ 7/17 ~ 7/17	100% 100%
구축		○ 위치 참조체계 구축 - CMS : 국가기초구역, 국가지점번호 - 공유마당 / 스마트서울맵 : 국가기초구역 ○ 웹 취약성 보완 작업 ○ 회원 인증 다원화 작업 - 페이스북 회원 인증 체계 변경 - 네이버 회원 인증 체계 개발	~ 7/28 ~ 7/22 ~ 7/10	100% 100% 100%
운영	일반 운영
	App 운영	○ 회원 인증 다원화 작업에 따른 App 등록 - 아이폰 등록 후 안드로이드 등록 ○ 앱 로그 적용 작업 - 해당 업체 및 서울시 관리 부서 협의 후 진행 예정	~7/10 미정	100% 미정
	OpenAPI	○ OpenAPI 연동 업무 지원 - 서울시 예산과 - 서울시 디자인 거버넌스 프로젝트	미정	100%
지도태깅 콘텐츠		○ 시즌 테마 등록 및 운영 - 한강행복몽땅 / 여름녹음길 - 시즌 특화 테마 발굴 및 등록	6/1 ~	계속

4. 이슈 관리

내용	해결방안	해결일 (예상일)
○ 웹 취약성 관련 사항	○ 웹 취약성 지적 사항 적용 방안 파악 중 ○ 스크립트 차단 등 웹 취약성에 맞춰 작업 진행 완료(2015년 1월)하였으나, 별도의 해킹 방식에 따른 이슈 발생 ○ 회원 연동(사용자 인증) 등에 따른 대책 수립 및 내용 변경 작업	7/22
○ 회원 인증 다원화 작업	○ 페이스북 계정 연동 정책 변경에 따른 작업 진행 ○ 네이버 회원 인증 작업 진행 ○ 다음 회원 인증 관련 웹용 OpenAPI 미제공 ○ 페이스북 / 네이버 인증 관련 이슈 --> SNS 신청 계정 생성 필요 ○ 이메일 및 표출 정보에 따른 정의 필요 ○ 네이버 / 페이스북 계정 확정	7/10
○ 고지도 지도태깅 관련 사항	○ 실 작업 기간 : 9월 1일 ~ 10월 말 ○ 10개 리스트 정리 : 7월 24일 ○ 구축 스토리보드 작성 : ~ 7월 17일 ○ 디자인 및 퍼블리싱 : 8월 1일 ~ 8월 30일 ○ 개발(프로그램 / 고지도 10개 적용 등) : 9월 1일 ~ 10월 말
○ 앱 로그 적용 관련	○ 업체에 적용 라이브러리 파일 요청하였으나, 협의 후 배포하겠다고 하여 대기 중 ○ 해당 사업 주관부서의 확인 필요

5. 협조 요청 사항

對 서울시
對 용역업체	○웹 취약성 일정 및 방식 보고 - 이유 및 적용, 해결 방안 보고 ○바로 e맵 적용을 위한 내용 정리 - POI 정제 - 도로명주소 사용 방식 등
기타

6. 월간보고 주요 내용

1. 바로 e맵 적용 관련 내용 정의

- POI 정제 방식 정의 후 국토지리정보원에 요청

- 국토지리정보원에 요청할 항목 등 내용 정리 필요

- 서울시 보유 POI 사용법 정의 필요

7. 산출물 관리

산출물 명	파트	주요 내용	파일 명	상태
테마 아이콘	디자인	서울의 정책	6월 테마아이콘.zip	완료
		광복 70주년		완료
		메르스 진료병원		완료
		한강행복몽땅		완료
스토리보드	기획	위치참조체계 스토리보드(6/29))	위치참조체계_V.1.0.0.pptx	완료
보고서	기획	바도E맵 적용 방안	바로E맵적용방안_20150701.docx	완료
2015년 6월 운영통계보고	운영	2015년 6월 운영보고서 (7/2)	2015년 6월 운영보고서(안)_20150703.hwp	완료
프로그램 산출물	구축	CMS 오류 개선 (6/30) 마스터 관리자 적용	상용서버 적용	완료
다국어번역	구축	다국어번역 데이터	서울시POI_번역요청_20150623(4개국어번역완료본).xlsx	완료
주간보고서	보고	주간보고서 (6/44)	주간보고********4(최종).hwp	완료
주간보고서	보고	주간보고서 (6/11)	주간보고********1(최종).hwp	완료
주간보고서	보고	주간보고서 (6/18)	주간보고********8(최종).hwp	완료
주간보고서	보고	주간보고서 (6/25)	주간보고********5(안).hwp	완료

[별첨] 1. 공간정보 플랫폼 사용 통계

(1) 테마 등록 현황                                                       (2015년 6월 30일 기준)

테마항목	사용		App 미사용		사용중지	총 수량 (2013년~ )
	신규	기 등록	등록대기	기 등록
지도태깅 공공테마(장애인)	0	2	0	0	0	2
지도태깅 공공테마	3	24	4	16	11	58
지도태깅 연계정보	0	2	0	0	2	4
합계	3	28	4	16	13	64

(2) 신규 / 등록대기 테마 정보                                            (2015년 6월 30일 기준)

구분	테마명	활용부서	테마 등록일
신규 서비스	서울의 정책	-	2015-06-17
	메르스 진료병원	-	2015-06-11
	광복70주년	복지정책과	2015-04-16
등록 대기	공동체주택	주택정책과	2015-04-28
	동작머하니	동작구청	2014-12-08
	서초생활정보	서초구청	2015-05-13
	한강행복몽땅	한강사업본부	2015-06-30

(3) 콘텐츠 등록 현황                                                     (2015년 6월 30일 기준)

테마항목	이전 수량	3월	4월	5월	소계	총 수량 (2013년~ )
지도태깅 공공테마(장애인)	6,562	0	0	0	0	6,562
지도태깅 공공테마	132,300	755	949	5,783	7,487	139,787
지도태깅 연계정보	10,815	-3,184	0	0	-3,184	7,631
합계	149,677	-2,429	949	5,783	4,303	153,980

(4) 콘텐츠 사용량                                                        (2015년 6월 30일 기준)

테마항목	이전 사용량	3월	4월	5월	소계	총 사용량 (2013년~ )
지도태깅 공공테마	2,743,798	295,771	195,151	238,963	729,885	3,473,683
지도태깅 공공테마(장애인)	117,617	7,894	8,517	8,309	24,720	142,337
지도태깅 연계정보	268,151	1,842	816	694	3,352	271,503
링크테마	3,866	82	35	43	160	4,026
참여테마	39,336	2,122	940	830	3,892	43,228
합계	3,172,768	307,711	205,459	248,839	726,009	3,934,777

(5) OpenAPI 사용량                                                      (2015년 6월 30일 기준)

항목	지도검색 (다국어)	POI 검색	주소 검색	테마검색	지도태깅연계	합계
이전	13,229,640	13,218	3,902,224	8,232,860	2,600,992	24,622,931
2015년 4월	164,001	65	297,393	439,114	97,803	998,376
2015년 5월	156,379	89	217,586	391,588	51,430	817,072
2015년 6월	173,048	270	135,196	415,054	127,078	850,646
소계	493,428	424	650,175	1,245,756	276,311	2,666,094
총 사용량	13,723,068	13,642	4,552,399	9,478,616	2,877,303	27,289,025

(6) 스마트서울맵 다운로드 현황                                           (2015년 6월 30일 기준)

기간	i-OS	Android				합계
		구글 마켓	네이버	올레마켓	U+ 마켓
이전	26,949	139,452	237	726	76	167,440
2015년 4월	656	2,945	84	3	-	3,688
2015년 5월	139	6,903	10	1	-	7,053
2015년 6월	103	11,569	6	0	-	11,678
소계	898	21,417	100	4	0	22,419
총 다운로드수	27,847	160,869	337	730	76	189,859

끝.