투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 풍수해대비 수해취약시설(공사장) 점검·정비 계획(토목부)

1. 방재안전시설부-2607호(2014.2.19)와 관련입니다.

2. 『`14년도 풍수해대비 수해취약시설(건설공사장)일제 점검․정비계획』에 의거 우리부 수해취약공사장 점검 및 정비 계획을 아래와 같이 수립 실시코자 합니다.

점검 및 정비계획

❍ 점검 및 정비 기간 : 2014. 2. 24 ~ 4. 30

❍ 주요 점검사항

- 공사장별 수방자재, 장비 및 가용상태, 수방대책 계획 수립 여부 등

- 유수소통 지장물 제거 및 배수처리 기능 확보 여부

- 하천제방 굴토 등 손괴시 우기전 복구계획 수립여부

- 토사유출 방지를 위한 시설(침사지 등) 설치여부

- 터널갱구 등 절개지 사면 안전 및 토류벽 안전조치(앵커 등 안전정착) 여부

- 공사장 인접 피해 우려지역 주민대피 등 조치계획 수립 여부

- 각 현장 특성(여건)에 맞는 자체 재해대책 수립 및 기타(교통통제 등) 수립여부

❍ 점검방법 및 시기

【1차 점검 및 정비】

- 점검방법 : 각 현장별 주요점검사항 자체 점검 및 정비 실시

- 점검기간 : '14. 2. 24 ~ 3. 7까지(12일간)

- 지적사항 정비 : 3. 18일까지 정비조치

【2차 점검 및 정비】

- 점검방법 : 시설국장 주관하에 실시(※ 필요시 외부전문가 합동점검)

□1차 점검결과 미 조치된 사항 위주로 중점점검 및 정비 조치

- 점검기간 : '14. 3. 24 ~ 3. 31까지(8일간)

- 지적사항 정비 : 4.15일까지 정비 조치

□기간내 정비가 곤란한 것은 4.30까지 정비대책 별도 수립 제출

붙임   1) 토목부 점검대상 건설공사장 현황 1부.

2) 수해취약시설 점검표 1부.

3) 수해취약시설 일제점검 및 정비결과 1부(제출양식).

4) 2014년 풍수해대비 건설공사장 일제 점검·정비 계획 1부.   끝.

주무관	조양연		광역도로과장	代조양연		토목부장	03/07 노우성
협조자
시행	토목부-4519	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	0237082557	/전송	0237082599	/	choaral@seoul.go.kr	/	대시민공개