투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	정로건설(주)
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 기간연장 승인(용산역전면2구역)

1. 용산역 2015-001(2015.07.01.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청한 교통안전시설물(신호)원인자 부담공사 기간 연장에 대하여 아래와 같이 승인하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물(신호)원인자 부담공사

나. 공사장소 : 용산구 용산역전면 2구역 도시환경정비사업 주변

다. 원 인 자 : 정로건설(구,륜덕종합건설)

라. 공사기간변경승인

- 당 초 : 2012.11.1.~ 2015.06.30.

- 변 경 : 2012.11.1.~ 2016.06.30.

(교통안전시설정보(TGIS)에 시설물정보 입력후 준공요청)

마. 변경사유 : 토목공정 지연으로 인한 절대 공기 부족. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	정성욱		주무관	윤석주		기전과장	07/06 이규철
협조자
시행	기전과-6918	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8396	/전송	02-300-8410	/	wook4125@seoul.go.kr	/	대시민공개