투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선2단계 917공구 설계변경 내역 통보 (기계분야)

「서울지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사」(기계)와 관련 우리부 설계 변경내역을 아래와 같이 통보하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명   : 지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사

나. 공사기간   : 2008.6.2.~ 2015.6

다. 시 공 사   : GS건설

라. 사 업 비   : 12,806백만원

마. 사업비 증감내역

구 분		설계변경 금액(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공사비		12,806,000,000	12,696,000,000	감110,000,000
차수	10차1회	1,736,000,000	1,736,000,000	0
	10차2회	1,736,000,000	1,626,000,000	감110,000,000

붙임 1. 설계변경검토보고서1부.

2. 설계변경내역서(별도송부)1부.

	도시철도설비부장
수신자	도시철도계획부장,도시철도토목부장
주무관	김경수		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	07/06 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6807	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7292	/전송	02)772-7308	/	kks123@seoul.go.kr	/	부분공개