서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간 연장 요청

1. 문화정책과-174(2015.7.5)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인“미래유산 표식 디자인 기획 및 기본설계 용역”의 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 계약업체 : ㈜문은배색채디자인

- 계약건명 : 서울 미래유산 표식 디자인 기획 및 기본설계 용역

- 계약금액 : 금19,360,000원(금일천구백삼십육만원)

나. 변경내용 : 계약기간 연장 (금액 변동 없음)

- 당 초 : 2015. 4. 1 ~ 2015. 7. 4

- 변 경 : 2015. 4. 1 ~ 2015. 8. 4.

* 연장사유 : 전문가 자문결과 완성도 높은 디자인 설계를 위해 추가 보완 필요

붙임  1. 용역기간 변경계획 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	문화정책과장
주무관	김혜원		문화정책팀장	강석		문화정책과장	07/06 박대우
협조자	계약1팀장	김점선
시행	문화정책과-245	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-2524	/전송	2133-1059	/	hwkim03@seoul.go.kr	/	부분공개(5)