문서번호	정수시설과-2778
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개

주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장			결재
박희준	김창현	07/06 차윤기
협 조

정수지밸브교체 전기공사 일일(6.29~7.1) 공정보고

공사명

정수지(1~4지)밸브 교체 전기공사

대상

정수지(1~4지)밸브 16대(유입밸브 8대, 유출밸브 8대)교체관련 전력

간선·동력전원 및 제어 케이블 설치, 밸브제어(mcc)판넬 설치 1면

공사기간

2015. 6. 4 ~ 2015. 7. 24

공정률

60%

투입인력

5명

작업내용

○ 정수지1~4지 유입밸브 공동구 전원·제어케이블 트레이 설치(계속)

○ 전동밸브 MCC 판넬 설치

○ 1지~4지 유입밸브 노출(ST)배관 설치

○ 작업사진

붙임 : 작업일보 3부.