문서번호	시설보수과-2474
결재일자	2015.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
신동헌		전결 07/07 이용재
협 조

사평지하차도 정밀점검 지적사항 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

남부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

사평지하차도 정밀점검 결과 지적사항 조치계획

시특법 제7조에 의거 시행한 사평지하차도 정밀점검용역 지적사항에 대하여

효율적인 시설물 유지관리를 위한 조치계획 보고사항 임

Ⅰ		시설물 현황

○ 시설물명 : 사평지하차도 (준공년도 2000년)

○ 규   모 : B=17.7m, L=500m (DB-24)

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명  : 2014년도 도로시설물 자체정밀점검(사평지하차도)

○ 용역기간  : 2014. 06. 01.  ~ 2014. 10. 30.

Ⅲ		용 역 결 과

○ 안전등급 결과

시설물명	용 역 평 가		안전등급	비 고
	안전성평가	상태평가
사평지하차도	-	B	B

- 책임기술자 의견 : 점검결과 시설물의 기능성 및 사용성에는 문제 없음

○ 주요손상 현황 : 별첨

- 중대결함 : 없음

- 기타 결함사항 : 콘크리트 균열, 박리 ․백태  등 일상적 보수사항

○ 부재별 결함사항에 따른 보수우선 순위

구분		결함(손상) 내용	보수‧보강 방법	단위	손상물량	보수물량	단가	개략공사비	우선 순위
B O X 구 간	슬래브	균열(0.3m미만)	표면처리	㎡	27.06	31.12	43,389	1,350,222	중기
		균열(0.3m이상)	주입보수	m	20.00	23.00	34,227	787,221	단기
		누수흔적	지속관찰	㎡	2.88	3.31	-	-
		망상균열	표면처리	㎡	108.40	124.66	43,389	5,408,873	장기
		박리	단면보수	㎡	0.09	0.10	179,117	18,539	단기
		백태	표면처리	㎡	3.11	3.58	43,389	155,181	중기
	벽체	균열(0.3mm미만)	표면처리	㎡	1.80	2.07	43,389	89,815	중기
		타일 탈락, 들뜸	타일시공	㎡	2.22	2.55	95,000	242,535	장기
		타일부 균열	지속관찰	m	73.20	84.18	-	-
		소화기 미설치		EA	4.00	4.60	-	-
	기둥	타일탈락, 파손	타일시공	㎡	1.32	1.52	95,000	144,210	장기
U-TYPE 옹벽		균열(0.3m미만)	표면처리	㎡	56.61	65.10	43,389	2,824,689	중기
		균열(0.3m이상)	주입보수	m	3.60	4.14	34,227	141,700	단기
		망상균열	표면처리	㎡	0.23	0.26	43,389	11,476	중기
		박리	단면보수	㎡	0.54	0.62	179,117	111,232	단기
		박락	단면보수	㎡	0.37	0.43	179,117	76,214	단기
		백태	표면처리	㎡	2.60	2.99	43,389	129,733	장기
		보수부재균열(0.3m미만)	표면처리	㎡	24.57	28.26	43,389	1,225,978	중기
		보수부재균열(0.3m이상)	주입보수	m	26.70	30.71	34,227	1,050,940	단기
		씰링재 탈락	씰링재충진	㎡	18.80	21.62	13,000	281,060	장기
		파손	단면보수	㎡	0.06	0.07	179,117	12,359	중기
		연석부 이격	지속관찰	m	118.40	136.16	-	-
포장면		아스콘 균열	지속관찰	m	1.00	1.15	-	-
		아스콘 패임	팻칭공법	㎡	19.29	22.18	10,000	221,835	장기
		조인트 변형	지속관찰	㎡	12.29	14.13	-	-
집수정		균열(0.3m미만)	표면처리	㎡	8.73	10.04	43,389	435,604	중기
		균열(0.3m이상)	주입공법	m	13.40	15.41	34,227	527,438	단기
		누수	주입보수	m	2.40	2.76	34,227	94,467	단기
부대		차량방호책	교체	m	8.00	9.20	600,000	5,520,000	장기

Ⅲ		조 치 계 획

○ 정밀점검 결과 결함사항 중 보수 1,2순위에 대하여 ‘15년 도로시설물 일상유지

보수공사 반영 보수

- 도로시설물 일상유지보수공사 우선정비 대상 시설 반영됨

- 소요공사비 : 5,610천원(균열보수, 콘크리트 단면보수, 표면보수 등)

붙임 : 관련공문 및 개략공사비 내역 각 1부. 끝.