서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강남구청장(사회복지과장)
(경유)
제목	충현복지관 기능보강사업 변경 검토결과 송부

1. 사회복지과-23470(2015.06.16.)호와 관련입니다.

2. 충현복지관 기능보강사업 변경요청에 대하여 아래와 같이 검토결과를 안내하오니 사업추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 : 충현복지관(강남구)

나. 사업명 : 석면철거, 천정 및 벽체 리모델링 공사 등

다. 사업비 : 총 72,163천원(35,123천원 변경 사용)

라. 요청내역 : 전기공사는 외부 후원으로 하고, 배관설비공사비 증액

(단위:천원)

변경대상	당 초 예 산	변 경 예 산	증(△)감	비 고
전기공사 (LED 일부교체)	35,123	-	△35,123
설비공사 (배관, 밸브공사)	37,040	72,163	35,123

마. 검토결과

요 청 이 유	검 토 결과
○ LED 조명기구 교체공사는 에너지 관리공단에서 후원을 받아 실시할 예정으로 공사비절감과, ○밸브교체 공사만 시행하였을 경우 배관과의 이음새 누수 등의 문제가 발생할 수 있다는 전문가 의견에 따라 배관교체공사를 함께 진행하는 것이 효율적으로 판단되어, 공사변경을 요청하고자 함..	- LED 조명기구 교체공사는 외부 후원으로 예산절감 효과가 있으며, 설비공사 확대는 이용자 및 시설 안전보강을 위한 구조 보강공사로서 기본 예산 한도내 사용으로 사업으로 변경요청이 적정함.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김종민		장애인재가복지팀장	김지형		장애인자립지원과장	07/07 이종만
협조자
시행	장애인자립지원과-325	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 1층(장애인자립지원과)	/
전화	2133-7451(7451)	/전송	02-2133-0722	/	godbachi@seoul.go.kr	/	대시민공개