투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 통보(감일~초이간 광역도로 개설공사)

1. 도로보수과-4345호(2014.7.25.)호 및 하남시 건설과-15185호(2015.3.31)와 관련입니다.

2. 경기도 하남시 건설과에서 시행하고 있는 『감일~초이간 광역도로개설 교통안전시설물

(노면표시)설치공사』 원인자부담 공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	구분	설계사	감리사	시공사	공사기간
					당 초	변 경
감일~초이간 광역도로개설 교통안전시설물 (노면표시)설치공사	노면 표시	㈜건영이앤씨	㈜건영 이앤씨	하남 시청	‘14.7.25 ~ '15.06.30	‘14.7.25 ~ '15.12.31

나. 변경사유 : 서울지방경찰청 규제 재심의에 따른 공사기간 연장.

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울강동경찰서장(경비교통과장),하남시장(건설과장)
주무관	이민호		도로보수과장	07/07 김환겸
협조자
시행	도로보수과-4715	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 대치동 서울 강남구 남부순환로 3142(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0356	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개