투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 연기 승인 통보(남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 구간)

1. 서울특별시도시기반시설본부 토목부-13947(2015.7.7.)호 와 관련입니다.

2.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1)공사명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 구간 교통안전시설물 설치공사

2)원인자 : 서울특별시도시기반시설본부(토목부)

3)시공사 : ㈜다해산업개발

4)공사기간

- 당초 : 2015.01.19.~2015.07.31.

- 변경 : 2015.01.19.~2015.10.30.

5)감리사 : ㈜트래픽스

3. 연기사유 : 한전지중화공사 지연에 따른 시설공사 지연으로 공사기간 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	양상규		기전과장	07/08 박재경
협조자
시행	기전과-8342	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개