투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인[잠실사거리 주변 교통체계 개선공사(보완)-신호]

1. 롯데건설주식회사 롯건진출램프 제2015-14호(2015.7.07.) 및 기전과-4486호(2015.5.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행하고 있는「잠실사거리 주변 교통체계 개선공사(보완) 관련 교통안전시설(신호)원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠실사거리 주변 교통체계 개선공사(보완) 관련 교통안전시설        (신호)원인자부담공사

나. 공사장소 : 송파구 잠실대교 남단삼거리, 올림픽로 버스승차대

다. 공사내용 : 교통신호기 신설 및 이설 등

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 당 초 : 승인일 ~ 2015. 6. 30.

- 변 경 : 승인일 ~ 2015. 8. 31.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	롯데건설주식회사,8호선진출램프조성사업 현장대리인 최형민
주무관	김동현		기전과장	07/08 남궁영주
협조자
시행	기전과-6396	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개