문서번호	정수시설과-6231
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	07/08 임정규
협조	행정관리과장		안창수
	주무관		박소현

기계설비 유지보수공사(연간단가) 1차 기성 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

영등포아리수정수센터

정수시설과

『기계설비 유지보수공사 (연간단가)』 1차 기성 보고

기계설비 유지보수공사(연간단가)에 대해 아래와 같이 1차 기성   처리하고자 보고함

❑ 공사계약 현황

○ 공 사 명  : 기계설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개 요 : 모터펌프 등 기계설비 수리 및 교체

○ 공사기간  : 2015.04.21. ~ 2015.12.31.

○ 계약금액  : 금67,275,100원(일금육천칠백이십칠만오천일백원)

○ 계 약 자 : (주)제이에스설비시스템,  대표자 박승빈

❑ 1차 기성 현황

○ 1차 기성내역

- 2정수장 활성탄흡착지 역세브로워 B호 수리

- 1정수장 응집지 3지1열 감속기 수리

- 1정수장 송수실 바닥배수펌프 교체 및 기타정비

- 2정수장 활성탄흡착지 여과수유출밸브 엑츄에이터 수리

- 2정수장 여과역세척펌프 D호 토출밸브 웜감속기 및 엑츄에이터 수리

- 관리본관 승강기외 2개소 비상통화연결장치 및 비상등전원장치 설치

- 2정수장 송수실 우장산5호 모터베어링 교체

- 2정수장 여과지 3지 표면세척수 유입밸브 엑츄에이터 및 제어함 교체

- 풍납취수장 유압발생장치 축압기 4대 수리

- 2정수장 표면세척수배관 신축관 교체

- 2정수장 침전지 슬러지인발펌프 B호 수리

- 관리본관 지열히트펌프 2호 압축기 교체 및 냉매충전

○ 1차 기성금액                                       (단위:원)

구 분	계약금액	1차기성금액	비 고
도 급 비	67,257,100	52,711,000	(제잡비포함)

○ 상기와 같이 1차 기성코자하며, 건강, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비는 미납부 및 미사용으로 납입증명원과 영수증을 제출하지 않아 감액조치하고자 함(합의서 별첨)

※ 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제8절 및

건설기술진흥법 시행규칙 제61조

❑ 조치계획

○ 상기와 같이 1차 기성처리 하고자 하며

○ 1,2차 작업실적 중 1차 기성금액에 미포함된 내역은 설계변경 후 준공금액에 포함하여 지출하고자 함

첨부 : 1. 1차기성 내역서 1부

2. 합의서 1부 .  끝.