투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 계약 변경 사항 알림(강남순환도시고속도로 8공구 건설공사)

1. 동기강 제2015-371호(2015.7.7.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로 8공구 건설공사』관련하여 하도급 계약 사항이 변경되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 하도급 계약(변경) 현황

하도급사	공 종	공 사 비				공사기간
		구분	원도급액	하도급액	비율 (%)
㈜정무이앤씨 대표 김대호	가로등 이설공사	당초	200,200,000	236,500,000	118.13	2012.05.04.~ 2015.05.31.
		변경	200,200,000	236,500,000	118.13	2012.05.04.~ 2016.05.31.

붙임 : 건설공사 하도급 변경계약 통보서 1부.(별도 송부)  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	명경출		토목부장	07/09 노우성
협조자	주무관	유근평
시행	토목부-14205	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개