문서번호	정수시설과-2435
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수		윤종민	07/09 이성재
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	주무관			변병수

테니스장 조성 사업 계획 변경 검토

2015. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

테니스장 조성 사업계획 변경 검토

우리 정수센터에서 시행하는 테니스장 조성공사의 사업비 예산부족으로 년내 사업 추진이 어려운 실정이며, 정수장 부지내 직원 체력증진 및 여가활동을 위한 체육시설 부족으로 다용도 구장 설치가 필요함에 따라 테니스장 조성 사업계획 변경에 관한 검토 보고임

□ 관련근거

○ 테니스장 개량 및 신설 검토 보고(정수시설과-278호, ‘14.4.3)

□ 사업현황

○ 사 업 명 : 2015년 뚝도정수센터내 테니스장 조성 공사

○ 사 업 비 : 70백만원(시설장비비)

○ 사업개요 : 테니스장 신설 1면

구분	위치	폭	연장	면	구 조
신설	정수지 2지 상부 (기존 테니스장 부지 옆)	17.2m	35.2m	1면	인조잔디

※ 기존 테니스장(1면) : ‘07년 신설, ’14년 시설 개량(인조잔디, 휀스 등) 완료

□ 보고내용

○ 2015년 테니스장 1면 추가 신설 및 예산 확보된 상태나 기 배정된 예산으로는 사업비 부족(-70백만원)으로 년내 사업 추진이 곤란함

- 본부 예산 편성(‘14년)시 사업추진비로 140백만원을 요구하였으나 시설장비비 예산부족으로 70백만원 감배정 편성됨

- 년내 테니스장 조성 사업 추진을 위하여 본부 기획예산과(담당) 협의한 바, 시설장비비 예산 추가 확보는 어려움

○ 센터내 직원 체력증진 및 여가활동을 위한 체육시설(구기)이 설치 되어 있지 않아 직원 화합 및 사기 진작을 위한 다용도(족구․배구) 구장 신설(사업비 70백만원) 필요

※ 2015. 7. 8(수) 센터 간부회시시 직원 의견을 수렴 노조 건의(요구) 사항임.

□ 조치계획

○ 정수지 상부 테니스장 조성공사는 예산부족으로 2016년 예산 편성 및 확보 후 사업 추진

- 테니스장(1면) 신설 : 140백만원(2016년 예산 편성)

1) 인조잔디(606㎡) : 27백만원

2) 토공, 잡석, 콘크리트 타설 : 50백만원

3) 울타리 휀스(104m) : 25백만원

4) 부대시설(배수로, 바람막이,심판대 등) : 38백만원

○ 다용도(족구․배구) 구장 신설은 테니스장 조성 사업예산(70백만원)을 활용 년내 사업 추진

- 다용도 구장(족구장, 배구장) 신설 : 70백만원

※ 규격 : 다용도 구장임을 감안 기존 테니스장 규격(시설)에 맞추어 시공

설치장소 : 정수지 상부 신설(예정) 테니스장 옆(아래도면 참조)

1) 인조잔디(606㎡) : 27백만원

2) 토공, 잡석(재활용-무대), 콘크리트 타설 : 30백만원

3) 부대시설(배수로, 네트, 심판대 등) : 13백만원

□ 행정사항

○ ‘16년 테니스장 조성사업 예산(시설장비비 140백만원) 반영 및  편성

○ 다용도(족구, 배구) 구장 신설 공사 관련,

- 인조잔디 설치 : 2015. 9월 조달 구매 설치

- 토공, 콘크리트 타설, 배수로 등 : 2015. 9월. 토목 건축 시설물 연간단가업체 작업지시

- 준 공 : 2015. 11월. 끝.