투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(서울숲공원 유아숲체험장 조성공사 실시설계용역)

서울숲공원에서 시행중인『 서울숲공원 유아숲체험장 조성공사 실시설계용역』과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 서울숲공원 유아숲체험장 조성공사 실시설계용역

○ 용역기간 : 2015.3.17 ~ 7.14

○ 도 급 액 : 일육백육십만원정(6,600,000원)

○ 계 약 자 : (주)진랜드엔지니어링 대표 최종오

○ 용역내용

- 서울숲공원 유아숲체험장 조성

나. 연기요청 기한

구 분	당 초	변 경
용역기간	2015.3.17 ~ 07.14	2015.03.17 ~ 07.28

다. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 연기사유 : 용역설명회결과를 반영한 설계변경이 필요해 과업수행기한이 부족함.

붙 임 :  준공기한 연기검토의뢰서 1부.  끝.

	서울숲공원관리사무소장
주무관	김윤수		시설팀장	현호재		서울숲공원관리사무소장	07/09 배정복
협조자
시행	서울숲공원관리사무소-3983	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울시 성동구 뚝섬로 273(성수1가1동685번지)	/
전화	(02)460-2918	/전송	(02)460-2930	/		/	대시민공개