함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2015년 전기설비 유지보수 공사(연간단가))

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『2015년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)』를 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약업체 : ㈜메타이앤지 송길용

다. 공사내용 : 탈수기동 비상전원 케이블 교체, 회수조 초음파 수위계 추가설치, 염소투입동 비상전원 케이블 교체 외(10건)

라. 계약기간 : 2015.04.22 ~ 2015.12.20

마. 설계변경 금액 내역                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	73,209,680	78,585,000	증 5,375,320

바. 설계변경사유 : 신규공종 및 물량 증․감 발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,기타교체비

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의위원회 심의결과 보고서 1부

3. 설계변경 심의위원회 개최 의견서 1부

4. 합의서 1부

5. 제비율검증 1부.  끝.        ※추산필:56번(07/09)

주무관	지동성		주무관	권영철		정수시설과장	김창현		광암아리수정수센터소장	07/09 차윤기
협조자	주무관	박희준
시행	정수시설과-2859	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5377	/전송		/		/	대시민공개